문서번호	설비부-2359
결재일자	2019.2.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
곽진곤		임병국	02/21 임정규
협조

서울바이오허브 조성 통신공사(2차)

설계변경 검토 보고

2019. 2.

서울바이오허브 조성 통신공사(2차)

설계변경 검토 보고

『서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사(2차)』와 관련, 건설사업 관리단으로부터 제출된 변경설계 실정 보고건에 대하여 검토후 아래와 같이 보고드림.

1		현 황

❏ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사

❍ 공사규모 : 신관동(대수선) 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 연구시설

별관동(신축)   지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡, 연구시설

❍ 공사내용 : 통합배선, CATV설비, 방송설비, CCTV설비, A/V설비, 비상벨

❍ 공사기간 : 2차‘18.03.20.~‘19.08.14. (총차‘17.09.28.~‘19.08.14.)

❍ 도 급 액 : 2차 538,784,000원 (총차 586,720,000원)

❍ 시 공 사 : ㈜세우엔지니어링

❍ 건설사업관리단 : ㈜한국종합건축사사무소

❏ 관련근거

❍ 본관동 통신장비 이전 및 신관동 일부 CD시공에 따른 설계변경 승인 요청

[한종홍릉 제2019-1238호, 2019.2.18.]

2		설계변경 검토

❏ 설계변경 사유

- 본관동 중앙관제실의 협소로 인해 전기,통신 등 각 공종의 장비 추가설치가 불가함에 따라 우선 시공한 통신장비의 이설이 불가피한 실정임

- 신관동  통신설비 공종의 원활한 진행을 위해 일부 강제전선관(노출) 시공 수량을 합성수지 가요전선관(CD관)으로 대체 필요

❏ 주요공정별 증감내용

장소	품명	단위	변경전	변경후	증·감	비 고
본관동	UTP케이블	m	0	1,350	증)1,350	통신장비이설
	폴리에틸렌 난연케이블	m	0	125	증) 125	통신장비이설
	시스템 종합시험	식	0	5	증) 5	통신장비이설
신관동	강제전선관 (노출,16㎜)	m	1,441	1,249	감) 192	통신공사
	합성수지제 가요전선관(CD관)	m	0	192	증) 192	통신공사

❏ 설계변경

구 분	변경전	변경후	증·감	비고
1 차	47,936,000	47,936,000	-	준공
2 차	538,784,000	585,849,000	증) 47,065,000
총 차	586,720,000	633,785,000	증) 47,065,000

금액                                             (단위: 원)

❏ 건설사업관리단 검토의견

❍ 기 실정보고 건(한종홍릉 제2018-1056호)에 의거 장비이설공사의 우선시공은 충실히 완료되었으며,

❍ 공사계약 일반조건, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 등 설계변경 관련규정에 따라 시공사의 요청대로 설계변경 및 계약변경을 하는 것이 타당하다고 사료됨.

3		보고자의견

❍ 본 공사 건설사업관리단의 기술의견사항을 검토한 결과, 내용이 적정하다고 판단되므로 계약금액을 변경하여 공정 관리에 차질이 없도록 조치하고자 함.

따로붙임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.