문서번호	교량안전과-2727
결재일자	2019.2.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		교량기획팀장	교량안전과장
이노진		박동욱	02/21 김종호
협 조

『교량시설물 도면정비 및 전산화 용역』 현장조사 관련 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 2.

안전총괄실

(교량안전과)

『교량시설물 도면정비 및 전산화 용역』

현장조사 관련 설계변경 검토 보고

교량시설물의 도면 정비 및 전산화를 위해 시행중인 용역의 현장조사 관련 설계변경 사항이 발생하여 검토하고 보고 드림

※현장조사 관련 변경사항 검토 보고(교량안전과-1690,‘19.2.1)의 재검토 내용임

Ⅰ		용역개요

○ 과 업 명 : 교량시설물 도면 정비 및 전산화 용역(1차)

○ 과업기간 : 2018.07.09. ~ 2019.3.31.(266일간)

○ 예 산 액 : 378,652천원

○ 계약업체 : ㈜경동엔지니어링

○ 주요공종 : 1. 교량별 현황 파악 및 도면 자료 확보

2. 교량별 도면정비 및 전산화

○ 주요 과업내용

- 각 교량별 현황 파악, 도면 자료 확보 및 검토

- 측량 및 철근탐사, 코어채취 등 현장 조사

- 각 교량별 종․평면도, 일반도, 철근배근도 등 일반도 및 상세도 작성

Ⅱ		추진경위

○ ‘18.04.19.              : 입찰공고 (※‵18.05.03.유찰)

○ ‘18.05.12.              : 재 입찰공고 (※‵18.05.24.유찰)

○ ‘18.07.04.              : 용역계약 (※수의계약)

○ ‘18.07.09.              : 용역 착수

○ ‘18.07.09.~’18.10.31. : 각 교량별 현황파악 및 도면 자료조사, 확보

○ ‘18.11.01. ~ 현재      : 현장조사(측량, 철근탐사 등) 완료, 도면 작성 중

Ⅲ		변경사항

○ 변경 공종 및 내용

구분	공종	단위	당초	변경	증감	변경 사유
변경	측량비	개소	18	24	증6	- 미보유도면 추가 측량(제원조사) 수행
	철근탄성파탐사	개소	43	34	감9	- 기존 자료 및 도면 확보, 성능개선공사 예정 제외
	고압물 세척	개소	43	8	감35	- 과업내용서 상 코어채취 시험 관련 공종으로 다음과 같은 사유로 변경개소 감소 ․기존 추가 도면 및 코어채취 자료 확보 ․작업자 안전사고 위험으로 코어채취 불가 (※ 급경사면에 위치, 철도 횡단구간 등) ․성능개선 공사 및 철거예정 교량인 경우 제외 ․바닥판의 경우, 열화의 주원인이 될 수 있어 배제
	초속경 단면 복구	개소	43	8	감35
	콘크리트 구멍뚫기	개소	43	8	감35
추가	강교 상세조사	개소	-	12	증12	- 과업내용서에 있으나 계약내역서에 없어 신규 추가

○ 계약금액 변경사항

구 분	단위	당 초	변 경	증 감	비 고
계약금액	원	378,652,000	375,995,000	감2,657,000	용역 1차분

Ⅳ		공정별 변경사항 검토

□ 측량비 변경 사항

○ 변경 현황

공종	단위	당초	변경	증감	변경 사유
측량비	개소	18	24	증6	- 미보유도면 추가, 기존 자료 확보 교량 제외

○ 검토 결과

- 종평면도 및 교대, 교각, 거더, 바닥판 일반도 작성 위한 측량(제원조사) 수행

- 현장조사 결과, 24개소 교량에 대하여 측량(제원조사 포함) 수행 완료

※ 총 24개소 = 과업발주(18개소) + 추가(14개소) - 제외(8개소)

※ 소요사업비 27,844,200원 증가

❖ 당초 과업발주 시, 18개소 선정

※ 교량시설물 도면 보유현황 사전 조사 자료(기존) 참조(붙임파일)

․ 대상교량 : 성내교, 대치교, 영동2교, 영동3교, 강일육교, 관악도림교, 노들북고가, 노들남고가, 동선고가, 목동교, 여의2교, 영등포R IC교, 망원1교, 망원2교, 반포대교북단교, 동빙고다리, 군자상단IC교, 군자하단IC교(총18개소)

※ 밑줄친 교량은 측량(제원조사)에서 제외되는 교량 표시

❖ 기존 자료 확인결과, 14개소 추가

․종평면도 및 일반도 보완 필요

․ 추가교량 : 선유고가, 월릉하단IC교, 월릉상단IC교, 중랑상단IC교, 중랑하단IC교, 서소문고가, 현저고가, 봉원고가, 기아대교, 소월고가, 삼각지고가, 수출의 다리, 개봉철도고가, 공단IC교(총14개소)

❖ 기존 자료 추가 확보, 8개소 제외

․종평면도 및 일반도 자료 추가 확보

․ 제외교량 : 영동2교, 영동3교, 강일육교, 동선고가, 목동교, 동빙고다리, 여의2교, 영등포R IC교(총8개소)

□ 철근탄성파탐사 변경 사항

○ 변경 현황

공종	단위	당초	변경	증감	변경 사유
철근탄성파탐사	개소	43	34	감9	- 미보유도면 추가, 기존 자료 확보, 철거예정 및 성능개선 용역 수행중 교량 제외

○ 검토 결과

- 구조도 작성 위한 철근 간격 및 피복두께 등 조사 수행

- 현장조사 결과, 35개소 교량에 대하여 철근탄성파탐사 수행 완료

※ 총 34개소 = 과업발주(43개소) + 추가(5개소) - 제외(14개소)

※ 소요사업비 18,066,373원 감소

❖ 당초 과업발주 시, 43개소 선정

※ 교량시설물 도면 보유현황 사전 조사 자료(기존) 참조(붙임파일)

- 부재별 배근도 및 긴장재 상세도 없는 경우 철근탄성파탐사 조사 개소 선정

․ 대상교량 : 올림픽대교, 양화교, 금천교, 모래내고가, 한남1고가, 성내교, 대치교, 영동2교, 영동3교, 강일육교, 서소문고가, 한남2고가, 소월고가, 수색교, 현저고가, 봉원고가, 욱천고가, 삼각지고가, 성산고가, 성산교, 여의교, 관악도림교, 철산교, 노들북고가, 노들남고가, 상계교, 동선고가, 장평교, 이문고가, 목동교, 오목교, 오금교, 여의2교, 개봉고가, 가리봉철도고가, 구로고가, 개봉철도고가, 영등포R IC교, 망원1교, 망원2교, 반포대교 북단교, 동빙고다리, 구일고가(총43개소)

※ 밑줄친 교량은 철근탄성파탐사에서 제외되는 교량 표시

❖ 도면 보유현황 사전 조사 자료(붙임) 확인결과, 5개소 추가

․배근도가 없거나 보완 필요

․ 추가교량 : 선유고가, 기아대교, 수출의 다리, 공단IC교, 송정교

❖ 도면 추가 확보, 14개소 제외

․배근도 추가 확보하여 철근탄성파 탐사 제외

(올림픽대교, 금천교, 한남1고가, 영동2교, 영동3교, 강일육교, 봉원고가, 성산고가, 동선고가, 목동교, 구일고가)

․철거예정인 교량인 경우 철근탄성파 탐사 제외(한남2고가, 구로고가)

․성능개선 용역수행 중으로  철근탄성파 탐사 제외(개봉고가)

․ 제외교량 : 올림픽대교, 금천교, 한남1고가, 영동2교, 영동3교, 강일육교, 한남2고가, 봉원고가, 성산고가, 동선고가, 목동교, 개봉고가, 구로고가, 구일고가

□ 고압물 세척, 초속경 단면 복구, 콘크리트 구멍 뚫기 변경 사항

○ 변경 현황

공종	단위	당초	변경	증감	변경 사유
고압물 세척	개소	43	8	감35	- 과업내용서 상 코어채취 시험 관련 공종으로 다음과 같은 사유로 변경개소 감소 ․기존 추가 도면 및 코어채취 자료 확보 ․작업자 안전사고 위험으로 코어채취 불가 (※ 급경사면에 위치, 철도 횡단구간 등) ․성능개선 공사중인 교량인 경우 제외 ․바닥판의 경우, 열화의 주원인이 될 수 있어 배제 - 배근도 보완이 필요하여 코어채취 추가
초속경 단면 복구	개소	43	8	감35
콘크리트 구멍뚫기	개소	43	8	감35

○ 검토 결과

- 고압물 세척, 초속경 단면 복구, 콘크리트 구멍 뚫기 공정은 과업내용서 상의 코어채취 현장조사에 해당되는 공정임

- 현장조사 결과, 6개소 교량에 대하여 철근탄성파탐사 수행 완료

※ 총 8개소 = 과업발주(43개소) - 제외(37개소) + 추가(2개소)

※ 소요사업비 38,977,400원 감소

(고압물 세척:감1,449,700 / 초속경 단면 복구:감7,497,700 / 콘크리트 구멍 뚫기:감30,030,000)

❖ 도면 보유현황 사전 조사 자료(붙임) 확인결과, 43개소 선정

※ 교량시설물 도면 보유현황 사전 조사 자료(기존) 참조(붙임파일)

- 부재별 배근도 및 긴장재 상세도 없는 경우 철근탄성파탐사 조사 개소 선정

․ 대상교량 : 올림픽대교, 양화교, 금천교, 모래내고가, 한남1고가, 성내교, 대치교, 영동2교, 영동3교, 강일육교, 서소문고가, 한남2고가, 소월고가, 수색교, 현저고가, 봉원고가, 욱천고가, 삼각지고가, 성산고가, 성산교, 여의교, 관악도림교, 철산교, 노들북고가, 노들남고가, 상계교, 동선고가, 장평교, 이문고가, 목동교, 오목교, 오금교, 여의2교, 개봉고가, 가리봉철도고가, 구로고가, 개봉철도고가, 영등포R IC교, 망원1교, 망원2교, 반포대교 북단교, 동빙고다리, 구일고가(총43개소)

※ 밑줄친 교량은 고압물세척, 초속경 단면 복구, 콘크리트 구멍 뚫기에서 제외되는 교량 표시

❖ 다음과 같은 사유로 37개소 제외

․바닥판(슬래브) 코어채취는 우수 침투로 인해 열화가 가속될 수 있어 배제

․철근탐사 및 기존 자료를 활용하여 배근도 작성가능한 경우 제외

(올림픽대교, 양화교, 금천교, 모래내고가, 한남1고가, 성내교, 대치교, 영동2교, 영동3교, 강일육교, 서소문고가, 소월고가, 봉원고가, 상산고가, 성산교, 여의교, 철산교. 상계교, 동선고가, 장평교, 이문고가, 목동교, 오금교, 영등포R IC교, 반포대교 북단교, 동빙고다리, 구일고가)

․코어채취 장비 접근 곤란(급경사지, 하상구간, 철도횡단 구간)하여 조사 불가

(망원1교, 망원2교, 수색교, 욱천고가, 삼각지고가, 개봉철도고가)

․기존 코어채취 자료 활용 (현저고가)

․철거예정이거나 성능계선공사 설계 및 시공중 인 경우

(한남2고가, 구로고가, 개봉고가)

❖ 도면 보유현황 사전 조사 자료(붙임) 확인결과, 2개소 추가

․배근도 보완이 필요하여 코어채취 필요 교량 추가

․ 추가교량 : 수출의 다리, 공단IC교

□ 강교 상세조사 추가사항

공종	단위	당초	변경	증감	변경 사유
강교 상세조사	개소	-	12	증12	- 과업내용서에 있으나 내역서에 없어 신규 추가

○ 검토 결과

- 강재일반도 및 상세도 작성을 위한 강교 상세조사 수행

- 현장조사 결과, 12개소 교량에 대하여 강교 상세조사 수행 완료

※ 총 12개소 = 현장조사 계획(16개소) + 추가(4개소) - 제외(8개소)

※ 소요사업비 27,329,629원 증가

❖ 현장조사 계획 시, 16개소 선정

※ 교량시설물 도면 보유현황 사전 조사 자료 참조(붙임파일)

․ 대상교량 : 금천교, 모래내고가, 망원5교, 수색교, 현저고가, 욱천고가, 삼각지고가, 고척교, 오목교, 여의2교, 안양교, 반포대교 북단교, 안양천교, 월릉하단IC교, 월릉상단IC교, 목동교 동측IC(F, G, E, D,)교

※ 밑줄친 교량은 강교 상세조사에서 제외되는 교량 표시

❖ 도면 보유현황 사전 조사 자료(붙임) 확인결과, 4개소 추가

․도면 보완이 필요하여 추가 조사 수행

․ 추가교량 : 선유고가, 기아대교, 강남터미널고가, 오금교

❖ 기존 자료 추가수집, 8개소 제외

․강재 일반도 및 상세도 자료 확보

(금천교, 월릉상단IC교, 안양천교)

․철거 후 신설 예정인 경우 강교 상세조사 대상교량에서 제외(안양교)

․철도횡단 구간(Plate거더)으로 조사 곤란(수색교)

․Preflex거더 교량으로 표준도 및 기존자료 활용

(고척교, 여의2교)

․강교가 아니므로 조사 필요 없는 교량(목동교 동측IC교)

․ 제외교량 : 금천교, 월릉상단IC교, 안양천교, 안양교, 수색교, 고척교, 여의2교, 목동교 동측IC교

○ 조사비용 산정

- 강박스 단면에 대하여 측정방법 및 시간을 투입인원수로 직접인건비(외업) 산출

- 직접인건비(외업) 고려사항 ※ 설계변경 산출내역서 참조(붙임파일)

․1단면 조사 시 단면 형태별 측점 수

․1단면 조사 시 조사 시간

․종방향 단면 조사 수, 투입인원 수

․직접인건비(외업) 인원수 산출

- 소요사업비 : 27,329,629원

□ 자문비 관련 변경사항

○ 검토 결과

- 1,000천원 자문수당 중 400천원(4명) 지출하여 600천원 감액 설계변경

Ⅴ		조치계획

○ 변동 내용에 대한 검토 결과를 용역사에 통보

○ 설계변경 사항에 대하여 계약 만료 전 설계변경 실시

- 계약금액 조정사항

※ 설계 변경 사항

- 측량비

- 철근탄성파탐사

- 고압물세척

- 초속경 단면 복구

- 콘크리트 구멍 뚫기

- 자문비

※ 설계 추가 사항

- 강교 상세조사

- 계약금액 조정내용

구 분	단위	당 초	변 경	증 감	비 고
계약금액	원	378,652,000	375,995,000	감2,657,000	용역 1차분

붙 임 : 1. 교량시설물 도면 보유현황 사전 조사(기존, 변경) 1부.

2. 설계변경 산출내역서 1부.
3. 중간보고 및 자문회의 결과보고 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.