문서번호	토목부-2806
결재일자	2019.2.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	02/21 김영수
협조
	주무관		황윤기

전면책임감리용역(7차) 발주 계획

- 천호대로(광나루역) 확장공사 외 1개소 -

2019.02.

토목부

전면책임감리용역(7차) 발주 계획

- 천호대로(광나루역) 확장공사 외 1개소 -

‘천호대로(광나루역) 확장공사’의 원활한 공정추진 및 안전하고 효율적인 현장관리를 위하여 전면책임감리용역(7차분)을 발주하고자 함

Ⅰ

용역개요

용 역 명 : 천호대로(광나루역) 확장공사 외 1개소 전면책임감리용역

용 역 사 : ㈜수성엔지니어링 대표이사 박미례

용역기간 및 계약금액 현황

(단위 : 천원)

구분	총괄	기시행 (1차~6차)	7차(금차)	비 고
기간	2010.11.01. ～ 2019.09.30.	2010.11.01. ～ 2019.02.22.	2019.02.23. ～ 2019.09.30.
금액	6,080,000	5,896,000	184,000

Ⅱ

현장 공정현황

공정율(실적/계획) : 94.29% / 96.78% - ‘19.02.19. 기준

추진 주요 공정

- 상징조형물 설치

- 상부경관개선 추가시설(화장실, 야외무대 등) 설치

- 상부 공원도로 안전시설물 설치

Ⅲ

용역발주 계획(7차)

감 리 원 : 토목분야 2인(특급 1인, 중급 1인)

전기(중급) 1인, 건축(중급) 1인, 조경(중급) 1인, 기계(중급) 1인

과업기간 : 2019.02.23. ～ 2019.09.30.

용 역 비 : 184,000천원

예산과목 : 도로계획과, 간선도로망확충(도시개발특별), 도시개발특별회계, 천호대로(광나루역) 확장, 시설비 및 부대비, 감리비

계약방법 : 장기계속 계약

Ⅳ

조치계획

『천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역(7차분)』을 발주하여 효율적으로 사업을 관리하고 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 전면책임감리용역(7차) 내역서 1부.  끝.