투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	스페이스 살림 조성공사 책임건설사업관리기술자
(경유)
제목	실정보고 승인 통보(스페이스 살림 조성공사)

1. HTSC 1902-20(2019.02.20.)호와 관련입니다.

2.『스페이스 살림 조성공사』와 관련하여 제출한 “방수공사 및 도장공사 시방서 일부 수정 적정성 실정보고”에 대하여 승인하오니 공정관리 및 안전·품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

□ 변경내역

구 분	변경 내용	증감 금액(원)	비 고
**************	********** ************************************** ******************* ********************************************************* ********** ******************************************* ******** *****************************************************	증감 없음

※ 건설사업관리단 검토의견 : 당 현장 방수공사, 도장공사 시방서의 재료명기사항이 특정 제품으로 명시되어 있어 전문공사(하도급) 업체 선정에 부적합 요소로 작용할 여지가 있어 설계자에 재검토 요청한 결과, 설계자가 검토 및 수정한 시방서 내용이 전문공사 업체 선정 및 동등 이상 제품으로 확인되어, 설계시방서를 개정하여 시공함이 적정하다고 사료됨.

3. 아울러, 계약금액 결정은 시장가격 조사 및 낙찰율 적용 등 관련절차에 따라 조정될 수 있음을 알려드립니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남광연		건축관리과장	차무흥		건축부장	02/22 임인구
협조자
시행	건축부-2840	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2658	/전송	02)3708-2659	/	kynam01@seoul.go.kr	/	부분공개(5)