투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사 계약변경 의뢰

1. 설비부-2359(2019.2.21.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진중인 『서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사』와 관련하여 아래와   같이 계약변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사

나. 계 약 자 : ㈜세우엔지니어링 대표 어연

다. 변경사항

변경내용	구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
계약금액	2 차	538,784,000원	585,849,000원	증) 47,065,000원
	총 차	586,720,000원	633,785,000원	증) 47,065,000원

라. 변경사유 : 본관동 통신장비 이설 및 신관동 일부 CD관 시공에 따른 설계변경

붙임 : 1. 검토보고서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 변경도서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	곽진곤		시책사업과장	임병국		설비부장	02/22 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-2429	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5,6)