“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	도시공간개선단장
(경유)
제목	용역 일시정지 알림

1. 역사도심재생과-1920호(2019. 2. 21.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중인 ************************과 관련하여 원활한 과업수행을 위하여 다음과 같이 용역을 일시정지하였음을 알려드리오니 설계공모 업무 수행에 참고하시기 바랍니다.

가, 용 역 명: ***********************

나. 계 약 자: ㈜엠에이건축사사무소

다. 계약금액: 금98,835천원

라. 계약기간: 2019. 1. 21. ~　2019. 8. 20.

마. 일시정지 기간: 2019. 3. 1. ~ 2019. 4. 30.

바. 재착수일: 2019. 5. 1.(예정)

사. 일시정지 사유: 운영위원회 구성 및 공모지침 작성 등의 공모절차는 별도 용역으로 시행되고 있는 기본계획이 확정되어야 가능함에 따라 기본계획 수립에 소요되는 기간(2개월 소요) 동안 용역수행을 일시 정지하고 재착수하고자 함.  끝.

							역사도심재생과장
주무관							이기명			도심정책팀장					김용민					역사도심재생과장					02/22 조남준
협조자
시행			역사도심재생과-1944									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로110 (태평로1가) 신청사 11층															/
전화		2133-8489						/전송			2133-0742					/	kmyeong@seoul.go.kr												/	부분공개(5)