문서번호	산지방재과-2169
결재일자	2019.2.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
최서영		정상모	02/25 장상규
협조

2019년 산사태 예방사업 현장심의 결과보고

2019. 02.

푸른도시국

(산지방재과)

’19년 산사태 예방사업 현장심의 결과보고

’19년 산사태 예방사업 중 추가 사업지와 재심의 대상사업 2개소 에 대해 외부전문가와 합동 현장실사 및 현장심의를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		현장심의 개요

□ 일    시 : ’19. 02. 18.(월)  10:00 ~ 18:00

□ 심의대상 : 사면정비사업 2개소

❍ 광진구(1) : 구의동 4-15

❍ 강동구(1) : 고덕동 296

□ 심의참석자 : 11명

❍ 산지방재과 : 사면정비팀장, 주무관

❍ 외부전문가 : 3명

- 정경문((주)선진엔지니어링, 지질 및 지반기술사)

- 김만일(산림조합중앙회, 산림 및 지질박사)

- 유영호((주)지아이엔지, 지질 및 지반기술사)

❍ 자치구

- 광진구청(3명) : 주무관, 설계자, 시공전문가

- 강동구청(3명) : 사업담당팀장, 주무관, 설계자

Ⅱ		현장심의 결과

□ 심의결과 : 조건부채택(2개소)

□ 심의내용

연번	기관명	위 치	사업개요	심의의견(지적사항)	심사결과
1	광진구	구의동 4-15	-사면정비(암반정비) -낙석방지망 220㎡ 암석깎기 50㎥	· 낙석예상 암괴 제거 · 2차 낙석예방을 위해 낙석방지 펜스 추가 설치 필요	조건부 채택
2	강동구	고덕동 296	-사면정비 -녹생토 2,000㎡ 낙석방지책 47경간 배수로 설치 등	·사면안전성 판단을 위한 근거자료로서 지반(지질)조사 실시 요함 ·사면 내로 지표수 침투 방지를 위해 사면 상부에 유도 배수로 설치 필요 ·기존 석축이 철거되면 배면이 이완되어 지반 변형이 우려되기에 석축을 철거하 지 말고 지반변형 계측기를 설치하여 지반의 변형여부를 지속 관찰 및 지반 보강 여부(시기)를 결정(판단)할 것	조건부 채택

□ 현장심의 사진

광진구 구의동 4-15
강동구 고덕동 296

Ⅲ		행정사항

□ 심의의견 반영 검토(자치구)

❍ 심의위원 의견(지적사항) 반영(설계보완) 검토 및 조치결과 제출

□ 심의(자문) 수당지급

❍ 자문의원 : 3명 × 200,000원 = 600,000원

❍ 예산과목 : 산지방재과, 산림안전관리, 산림재해방지, 산림내 사면정비, 사무관리비

붙임 : 1. 현장심의 결과(1차) 1부.

2. 현장심의 지적사항 조치계획 각1부.

3. 현장심의위원 심의의견서 각1부.

4. 심의위원 참석확인 1부.  끝.