문서번호	조경과-2730
결재일자	2019.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
강정호		석승우	02/25 代최석환
협조

- 2019년 생활주변 자투리땅 녹화사업 –

대상지 변경(추가) 요청에 대한 검토보고

2019. 02.

조 경 과

(조경시설팀)

- 2019년 생활주변 자투리땅 녹화사업 -

대상지 변경(추가) 요청에 대한 검토보고

‘2019년 생활주변 자투리땅 녹화사업’과 관련하여 강동구에서 대상지 변경(추가) 승인요청이 있어 아래와 같이 검토보고 드림.

1		사업개요

◯ 사 업 명 : 2019년 생활주변 자투리땅 녹화사업

◯ 대 상 지 : 종로구 평창동 148-17 등 4개소

◯ 규    모 : 491㎡

◯ 사업기간 : 2019. 01.~10.

◯ 사 업 비 : 135백만원

◯ 사업내용 : 꽃, 유실수 등 수목식재, 쉼터조성 등

2		요청개요

◯ 사업기관 : 강동구 푸른도시과

◯ 요청사항 : 대상지 추가에 따른 승인

◯ 추가 대상지 개요

구분	계	당초	추가			비고
대상지	4개소	1개소	3개소			3개소 추가
		천호동 133-2 (시유지)	천호동 133-49 (시유지)	천호동 217-142 (시유지)	천호동 217-38,39 (시유지)
규모	218㎡	24㎡	2㎡	7㎡	185㎡
사업비	25백만원	25백만원

◯ 자치구 의견

- 천호동 217-38,39(185㎡) 일대는 민원(쓰레기 적치 방지 및 보식 요청)이 많아 대상지 녹화를 통한 주민요구사항 충족

- 면적이 소규모(2~7㎡)인 자투리땅은 향후 개별사업으로 추진하기 어려워, 금번 사업추진 시 도로를 따라 분산된 대상지들을 통합하여 사업의 효율성 제고

3		검토결과

◯ 추가 대상지 변경(추가) 승인

- 총사업비 변경이 없는 범위 내에서, 경관개선 및 녹지량 확충을 위해 대상지를 추가하여 사업추진

4		행정사항

◯ 대상지 변경(추가) 승인 통보(시 → 강동구)

붙임 : 추가 대상지 승인요청 공문 1부.  끝.