문서번호	급수운영과-3365
결재일자	2019.2.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김재영		이문성	02/25 代이문성
협 조
	주무관			박상권
	주무관			정성식
	주무관			이한수
	주무관			윤승구

설계변경 심의결과 보고(2018년 노원구 관내 급수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

급 수 운 영 과

설계변경 심의결과 보고

우리사업소에서 시행중인 「2018년 노원구 관내 급수공사(장기계속단가계약)」에

대해 신규공종 및 시공물량 증·감 등으로 설계변경 사유가 발생하여 아래와

같이 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고합니다.

1. 공사 개요

1) 공 사 명 : 2018년 노원구관내 급수공사(장기계속단가계약)

2) 공사기간 : 2018. 6. 27. ~ 2019. 06. 30.

3) 공사비  : *****************

4) 도 급 자 : ****************

5) 감 리 자 : ************

2. 심의회 개최현황

1) 심의일정 : 2019. 2. 25. 14:00

2) 심의장소 :  급수운영과 사무실

3) 심의위원장 : 급수운영과장

4) 심의위원 : 시설7급 윤승구, 시설7급 박상권, 시설7급 이한수, 시설7급 정성식

3. 심의 내용

1) 물량변동의 적정성 여부

2) 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 심의 결과

1) 설계변경의 타당성 : 타당함

2) 신규공종 단가 산출 적정 여부 : 적정함

3) 계약변동(증·감)물량 계약단가 낙찰률 적정 적용 여부 : 적정함

4) 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

5) 각종 제반규정 준수 여부 : 준수

5. 조치 의견

위와 같이 설계변경 내역 심의결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여 본   심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

첨 부 : 1) 설계변경 심의 결정서 1부.

2) 설계변경사유서 1부.

3) 설계변경내역서 1부. 끝.