투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	설계변경 요청(제3처리장 건식탈황탑 첨착활성탄 교체공사)

1. 운영과-1471호(2019.2.26.)와 관련입니다.

2. 우리센터 「제3처리장 건식탈황탑 첨착활성탄 교체」 1건에 대하여 설계변경으로 요청하로니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명: 제3처리장 건식탈황탑 첨착활성탄 교체공사

나. 계약금약: 금32,494,000원(금삼천이백사십구만사천원정)

다. 계약업체: ㈜언더테크 대표: 홍인한

라. 설계변경 내용

계 약 명	변경 전	변경 후	증감내용
제3처리장 건식탈황탑 첨착활성탄 교체	32,494,000	34,012,000	증 1,518,000

마. 예산과목: 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,                      수선유지교체비

붙임: 1. 공정보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	운영과장
★주무관	도형철		주무관	김영부		운영과장	02/26 최영효
협조자
시행	운영과-1480	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)