문서번호	건축부-3022
결재일자	2019.2.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		문화시설과장	건축부장
박춘복		박범규	전결 02/26 임인구
협조

「한양도성 인왕·백악구간 성벽 보수공사」

준공기한 연기 검토 보고(2차분)

2019. 2.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「한양도성 인왕·백악구간 성벽보수공사」

준공기한 연기 검토 보고(2차분)

「한양도성 인왕·백악구간 성벽 보수공사」관련 2차 계약분 공사에 대한 준공기한 연기 검토 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 한양도성 인왕․백악구간 성벽 보수공사(장기계속-2차)

○ 위    치 : (인왕구간)종로구 부암동 산22-1, (백악구간)성북구 성북동 산25-1

*******************************************

○ 공사기간 : ‘17. 10. 8 ~ ’19. 12. 7(2차 기간 : ‘18. 7. 25 ~ ’19. 3. 7)

○ 시 공 사 : 원택건설(주), 세헌건설(주)

○ 감 리 자 : ㈜이상건축사사무소

□ 추진경위

○ ‘17. 12.  8 : 공사 착수

○ ‘18.  7. 25 : 2차공사 착수

*********************************************

************************************************************************************************************************************

******************************************

********************************************************************************************************************************

○ ‘19.  2. 22 : 2차공사 준공기한 연기 검토보고(감리원→건축부)

□ 관련근거

○ 2차공사 준공기한 연기 검토보고***********************************

***************************************************************

*************************

*********

***********************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*******

*************************************

************************************

○ 연기 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미 부과

□ 감리자 의견

○ 시공사의 2차공사 준공기한 연기 요청건을 검토한 결과, 폭염 등에 따른 공사    일시정지를 사유로 한 준공기한 연기는 타당함

□ 처리의견

○ 위와 같이 감리자 의견에 따라 2차공사 준공기한 연기에 따른 계약변경을 시행하여 공사 추진코저 함

붙임 : 1) (감리자)2차공사 준공기한 연기 검토보고

2) (시공자)2차공사 준공기한 연기요청서(변경전·후 공정표)

3) 합의각서.  끝.