투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고(금하지하차도 유출지하수 처리비 반영) 및 민원사항 조치방안 검토)

1. 업무지시현장 : 강남순환도시고속도로 건설(4공구) 롯데건설(주), 서영엔지니어링

2. 작 성 일 자 : 2019-02-26

3. 지 시 내 용

가. 서영강남 19-34호 관련입니다.

나. 위 호로 실정보고한 “금하지하차도 유출지하수 처리비 반영”을 승인하오니, 추후 설계변경시 반영하고 정산 처리하시기 바랍니다.

다. 서해안고속도로→강남순환로, 강남순환로→성산, 수원~광명 방향 램프구간은 콘크리트 포장에 콘크리트 방호벽이라서 야간에 방호벽 충돌 위험이 많다는 민원이 있으니, 방호벽 시인성 개선방안(타현장 사례참조)을 검토하여 주시기 바랍니다. 끝.

주무관							박운용			도시고속도로과장					02/26 명경출
협조자
시행			토목부-3079									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02)3708-8662						/전송			02-3708-2599					/	parktiger93@seoul.go.kr												/	대시민공개