문서번호	설비부-2598
결재일자	2019.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	02/27 임정규
협 조

- 고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치 - 전기공사 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 02.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치 -

전기공사 시행 계획 보고

우리 본부에서 추진 중인『고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치 사업』 관련 전기공사 시행 계획에 대하여 아래와 같이 보고 드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치공사(전기) 시행 요청

[토목부-2541(2019. 2. 18.)]

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치 전기공사

공사위치 : 강동구 강일동 아리수로(고덕교)

공사규모

○ 토목 : 고덕교 확장(4→6차로, 연장 40M), 보도교 2개소 신설(고덕교 양측)

○ 전기 : 보도교 핸드레일 조명(LED 106개), 가로등(LED100W) 3본 설치

가로등 3본 이설, 분전반 1면 설치, 교통신호기 이설 1식

공사기간 : 착공일로부터 ~ 2020. 1. 17. 까지

공사금액 : 211,488천원(도급비 161,678, 관급비 34,110, 이전비 15,700)

설 계 사 : ㈜경화엔지니어링

위치도 및 현황사진

□ 위 치 도

□ 현황사진

보도교 신설

고덕교 확장

(4 ⇒ 6차로)

Ⅲ
		추 진 경 위

2017. 11. 01. : 실시설계(보완) 용역 시행 (도시철도 토목부)

⇒ 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사에 포함된 고덕교 확장을 공사 진행중 차량기지 입·출고선 저촉 문제로 도시철도 토목부에서 설계완료 후 토목부로 별도 분리사업으로 사업부서 변경 결정

2018. 09. 31. : 실시설계 용역 준공

2018. 11. 06. : 좋은빛 위원회 심의 이행

2019. 01. 18. : 토목공사 착공

2019. 02. 18. : 전기공사 시행요청(토목부 ⇒ 설비부)

Ⅳ
		공사발주 방법

입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

공사기간 : 2020. 1. 17.까지(토목 준공기한)

총공사비                                             [단위 : 원]

합계	도급비	관급비	이전비	비고
211,488,000	161,678,000	34,110,000	15,700,000

예산과목 : 광역교통시설 특별회계

○ 부서)도로계획과, 정책)도로건설, 단위)광역도로건설(광역도로시설특별회계) 세부)사가정길~암사동간 도로개설(고덕교확장), 편성목)시설비 및 부대비, 통계목)시설비

입찰참가자격

○ 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업 면허 보유 등록 업체

○ 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울특별시에 주된 영업소를 둔 자

낙찰자 결정 : 시설공사 적격심사 세부기준(행정안전부 예규)에 의함

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조 및 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규) 제2장 시설공사 적격심사 세부기준에 의거 결정함

현장설명 : 미실시

○ 지방계약법 시행령 제15조 제3항 단서규정에 의거 생략

하자담보 책임 존속기간

○ 전기공사업법 시행령 제11조의2(전기공사의 종류별 하자담보책임기간)에 의한 하자담보 책임 기간

그 밖에 입찰에 필요한 사항

○ 직접시공 및 적정임금 지급

계약상대자 이행각서 제출

· 제출근거 : 서울특별시 공사계약 특수조건 제20조의3 및 제24조 10항

· 제출기한 : 계약일로부터 7일 이내

· 이행각서

적정임금(시중노임단가 이상) 서울특별시 지급의무 이행각서

서울특별시 직접시공 각서

안내방법 : 입찰공고문 명시

·“서울특별시 공사계약 특수조건” 제20조의 3에 따라 계약상대자는 직접 시공하여야   하며, 계약체결일로부터 7일이내에“서울특별시 직접시공 각서”를 도시기반시설본부   설비부 담당자에게 제출하여야 함

·“서울특별시 공사계약 특수조건”제24조10항에 따라 계약상대자는 근로자에 대한 “적정임금(시중노임단가 이상) 서울특별시 지급의무 이행 각서”를 계약 체결일로부터   7일 이내에 도시기반시설본부 설비부 담당자에게 제출하여야 함.

○ 안전매뉴얼 사용 의무대상 공사 : 공사 착공시 아래 안전 관련 서약서 제출

건설공사장 설비분야 안전매뉴얼 활용 서약서

공사장 설비분야 사고 초기대응 매뉴얼 활용 서약서

Ⅴ
		관급자재 발주방법

구매방법 : 조달구매(제3자단가계약)

관련규정

○ 조달사업에 관한 법률 제5조의2 및 같은법 시행령 제9조의3 제1항

⇒ 조달청장이 계약 체결한 수요물자(제3자단가계약, 다수공급자계약)에 해당

관급자재 현황                                    [단위 : 원]

품 명	규 격	단위	수량	단가	금 액	비고
LED 경관조명기구	LED BAR, 14W	개	106	320,000	33,920,000
조달수수료	3자단가(0.54%)	식	1		190,000
합계					34,110,000

Ⅵ
		향 후 계 획

2019. 03. : 시설공사 발주 및 관급자재 구매 의뢰

2019. 03. : 시설공사 계약 및 착공

2020. 01. : 공사준공

붙임 : 1. 전기공사 시행요청 공문[토목부-2541(2019.02.18.)호] 1부.

2. 발주계획(토목부) 1부.   끝.