문서번호	시설관리과-1992
결재일자	2019.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
최성일		정윤홍	02/27 이규상
협 조
	주무관			김진민

`상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿음직한 아리수‘

상수도관 전기방식 설계용역 완료구간

우선 공사대상 선정을 위한 재 평가 계획

2019. 2.

상수도사업본부

(시설안전부)

상수도관 전기방식 설계용역 완료구간

우선 공사대상 선정을 위한 재 평가 계획

상수도관 전기방식 설계용역 완료(2009년, 2010년) 구간에 대해 전기방식 시설물 설치 필요성, 지장물 등 현장여건 등을 재 평가하여 우선 공사대상을 선정코자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 전식방식 시설물 설치 필요성이 높은 곳 우선적 선정

○ 공사 시급성, 민원발생 가능성, 지장물·교통통제 등 항목설정

○ 항목별로 점수를 부여하여 계량화된 수치적용

○ 구체적·객관적인 우선순위 선정

□ 2018년 우선공사대상 선정 조사결과 재 평가 필요

○ 한전인입선로, 도로굴착 가능성, 상수도관 교체(개량) 여부

※ 우선 공사대상 현장 조사결과보고(시설관리과-7202, 2018. 8.29.)

Ⅱ		설계용역 현황

□ 설계용역 현황(2009, 2010년)

(단위:㎞/개소)

구 분	계	2009년	2010년	비고
대 상	200/150	80/85	120/65
완 료	127/93	45/50	82/43
2019년 계획	8/6	2/2	6/4
관 폐쇄(예정)	18/17	13/13	5/4	사업제외
잔여분	47/34	20/20	27/14

□ 사업소별 사업물량 잔여 현황

(단위:㎞/개소)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대 상	200/150	20/12	33/18	74/44	15/15	16/18	6/6	24/25	12/12
완 료	127/93	10/6	29/16	43/26	12/12	12/13	6/6	9/9	6/5
2019 계획	8/6	1/1	-	5/3	-	-	-	2/2	-
관 폐쇄(예정)등	18/17	2/1	-	4/4	3/3	3/3	-	4/4	2/2
잔여분	47/34	7/4	4/2	22/11	완료	1/2	완료	9/10	4/5

※ 관 폐쇄,예정 등(17개소) : 교체(예정) : 13, 기 설치(원인자 포함) : 3, 공동구 : 1

Ⅲ		현장 조사(점검)계획

□ 조사방향

○ 공사 시급성, 민원발생 가능성, 지장물·교통통제 등 항목설정

○ 구체적·객관적인 점수를 부여하여 계량화된 수치적용

□ 조사개요

○ 대  상 : 용역 미시행구간  34개소(붙임)

※ 2018년 우선공사대상 선정 조사결과 관 폐쇄(예정) 및 2019년 사업대상 제외

○ 일  정 : 2019. 3. ~ 6월

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대상(개소)	34	4	2	11	-	2	-	10	5
조사기간		6.3. ~ 6.7.	6.10. ~ 6.11.	3.11. ~ 3.29.	-	4.11. ~ 4.19.	-	5.7. ~ 5.31.	5.23. ~ 5.31.
평가기간		2019. 5. ~ 6.

※ `19년 상반기 기전시설물점검 일정에 따라 조사기간 조정

○ 조사방법

<본부 및 사업소 합동>

- 조 사 자 ┌ 본  부 : 시설관리과***************

└ 사업소 : 시설관리과(기전팀)

- 조사내용

· 관로부식(관로연수) 여부

· 교통량, 인입전원. 민원성 여부

· 상수도관 교체 계획 여부(배수과 협조)

<사업소 자체 >

- 점 검 자 : 사업소 시설관리과(기전팀)

- 조사내용 : 도로굴착, 교통통제 여부

○ 조사절차

➀ 현장조사1		➁ 현장조사2		➂ 평 가			➃ 선 정
관로부식 등 조사		도로굴착 여부조사		점수화 평가			우선순위 선정
관로부식(연식) 여부 민원성, 교통량 등	⇨	도로굴착 여부 지장물 여부	⇨	현장조사 항목 적용 항목별 점수화	⇨		공사대상 우선선정 (필요성이 높은곳)
본부·사업소 합동		사업소 자체		본부·사업소 합동			본부·사업소 합동

Ⅳ		향후 계획

□ 우선 순위 평가 후 2019년 이후 공사대상 적용

붙 임  1. 조사대상 1부.

2. 현장 조사표 및 선정 조사결과표(서식) 1부. 끝.