문서번호	도로시설과-11942
결재일자	2018.11.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	터널복개팀장	도로시설과장
이기승	김두석	11/05 김진효

『도로시설물(터널,복개,지하차도)』

도면 복원화 용역 발주

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

안전총괄본부

(도로시설과)

『 도로시설물(터널,복개,지하차도)』

도면 복원화 용역 발주

시설물 준공 이후 기간 경과 및 관리 기관의 잦은 이동 및 변경 등으로 손실된 도로시설물(터널,복개,지하차도)의 도면 복원화 발주 보고임

〔“도면복원화 추진계획” 본부장 방침관련, (도로시설과-15141,‘17.12)〕

Ⅰ		추진배경

○ 우리시 도로시설물의 유지관리를 위한 정밀안전진단(정밀점검등 포함)시 도면 부재에 따른 내구성 및 내하력 평가를 위한 구조해석 어려움 초래등 도면 복원 필요

Ⅱ		추진근거

○ 도면복원화 추진계획 보고(도로시설과-15141, ‘17.12, 본부장 방침)

○ 도로시설물(터널,지하차도,복개) 도면 보유현황

관리기관	계			터널		지하차도		복개구조물		비고
	총	보유	일부 분실	보유	일부 분실	보유	일부 분실	보유	일부 분실
총 계	189	52	137	10	25	38	68	4	44
서울시설공단	33	22	11	4	0	18	10	0	1
6개 도로사업소	156	30	126	6	25	20	58	4	43

Ⅲ		추진경위

○ ‘18.1~6.   도면보유 현황파악 및 설계서 작성

○ ‘18.07.     기술용역 타당성 심사

○ ‘18.08.     건설기술용역 심의(용역발주)

○ ‘18.09.     사업수행능력 평가기준(PQ) 심의 및 사전규격 공개

Ⅳ		용역시행 계획

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 도로시설물(터널,지하차도,복개) 도면 복원화 용역

○ 용역기간 : 2018. 12 ~ 2019. 12 (13개월, 장기계속)

○ 총용역비 : 약 919백만원원 (1차 400백만원, 2차 519백만원)

○ 대    상 : 137개 시설물 (터널 25, 지하차도 68, 복개 44)

○ 주요 과업내용

□ 일반도(종평면도, 슬래브, 기둥, 벽체등) 작성을 위한 측량 및 실측 조사

□ 구조도(슬래브, 기둥, 벽체, 옹벽등의 철근배근도) 작성을 위한 철근탐사 혹은 코어채취등 실시

□ 신축이음장치, 배수시설, 공동구등 도면 작성을 위한 현장조사 및 자료 검토

□ 용역입찰방법

○ 입찰방식 : 일반입찰 (사업수행능력 평가후 가격입찰)

○ 입찰참가자격

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 참가자격을 갖춘 업체로서 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자

· 공고일 현재 엔지니어링 산업진흥법 제21조 및 같은법 시행령 제33조의 규정에 의거 건설부문중 3개 분야(구조,토질․지질,측량·지적)의 엔지니어링 사업자 신고를 필한 업체 또는 기술사법 제6조 규정에 의한 건설부분중 3개 분야(구조,토질․기초,측량·지형공간정보)의 기술사사무소를 개설 등록한 업체

· 『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』 제 28조 및 동법 시행령 제23조에 의거 ‘안전진단전문기관(교량 및 터널분야)’ 또는 ‘안전진단전문기관(종합분야)’로 등록된 업체이어야 합니다.

- 기술의 상호 보완을 위하여 공동도급(공동이행방식)으로 3개 업체까지 참여가능 하고, 공동이행방식 참여 구성원별 참여 비율은 15%이상으로 하며 공동수급업체 대표자는 출자비율이 50%이상인 업체로 함

Ⅴ		향후계획

□ 예산 조치계획 (장기계속계약)

○ 1차발주(400백만원) : 도로시설물 일상유지보수비

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널,복개, 지하차도,세척) 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 2차발주(450백만원) : ‘19년 예산 편성

□ 향후 추진일정

○ ‘18.11.   용역발주 및 공고

○ ‘18.12.   용역 계약 및 착수

○ ‘19.12.   용역 준공

붙임 : 발주서류 1부.   끝.