문서번호	교통운영과-20488
결재일자	2018.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		BRT팀장	교통운영과장
류근호		전태호	12/04 강진동
협조

중앙버스전용차로 흐름개선사업 예산 재배정 검토 보고

2018. 12.

도시교통본부

(교통운영과)

2018년 흐름개선사업 예산 재배정 검토

금년도 중앙버스전용차로 흐름개선사업 중 강서구 등촌삼거리 사업과 관련하여 추가 예산 재배정 요청에 따라 조치계획을 보고 드림

□ 검토 근거

○ 중앙버스전용차로 흐름개선사업 예산 추가배정 요청(교통행정과-99024, ‘18.11.22)

- 요청 사유: 설계 변경에 따른 공사비용 추가 발생

□ 요청 내용

○ 주요 설계변경 내용

- CCTV, 다기능 무인카메라 이설비 발생

- CCTV, 다기능 무인카메라 이설에 따른 설계비

○ 요청 금액: 101,432천원

- 공사비 187,654천원이 추가 소요되나, 낙찰차액 등을 활용하여 집행토록 할 경우에 추가 재배정이 필요한 금액은 101,432천원임

사업명	당 초	요청 금액	변 경	비 고
중앙버스전용차로 흐름개선사업 (등촌삼거리)	503,090천원	101,432천원	604,522천원	강서구 교통행정과

□ 검토 의견

○ 당초 필요한 이설비였으나, 아직 재배정되지 않은 예산임을 감안하여 추가 재배정함이 타당함

□ 조치 계획

○ 금년 내 사업 완료를 위하여 조속히 재배정하고자 함

붙임 : 강서구 등촌삼거리 중앙버스전용차로 흐름개선사업 예산 요청 1부.  끝.