문서번호	토목부-3241
결재일자	2019.2.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
차승환	김동현	김영수		02/27 이택근
협 조

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계  용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2019. 2.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역 -

준공기한 연기 검토 보고

「 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계」 용역수행자가 제출한준공기한 연기요청에 대하여 검토 보고드림

※ 제일(발)2019-473호(2019. 0 2. 25.)

□ 관련근거

❍ 계약기간 변경요청 [동일(도로) 제19-436호(2019.02.25.)]

❍ 계약기간 변경에 대한 검토의견 [제일(발)2019-473호(2019.02.25.)]

□ 사업개요

❍ 위    치: 서울특별시 영등포구 양평동 월드컵대교 남단

❍ 규    모: 연결로 5개소, 지하차도

- 남단IC 연결로(폭 1차로): 교량 및 교각 형식 검토

- 강남방향 연결로(폭 1차로): 접속방법 개선(지하차도 → 교량)

- 접속교: 연결로 신설 및 변경에 따른 종단선형 검토

❍ 용역기간: 2017. 8. 7. ~ 2019. 02. 28.

❍ 용역금액: 1,136,335,000원

❍ 용 역 사: ㈜동일기술공사, ㈜동성엔지니어링, ㈜태조엔지니어링, ㈜지아이건설기술그룹, ㈜수성건설엔지니어링

□ 추진경위

❍ 2017. 2. 16.: 월드컵대교 남단 보완설계 추진계획보고 (부시장 보고)

❍ 2017. 3. 28.: 월드컵대교 남단 보완설계 시행계획 검토 보고

❍ 2017. 4. 26.: 설계용역 추진방안 보고

❍ 2017. 8. 11.: 보완설계용역 계약 및 착수

❍ 2018. 4.  5.: 월드컵대교 남단 연결로 설치계획 보고

❍ 2018.11. 28.: 설계변경에 대한 검토의견서 제출

❍ 2019.01. 28.: 안양천 램프D 하천점용허가 요청

❍ 2019.02. 11.: 월드컵대교남단 접속교(강북방향) 개량구조검토 제출

□ 건설사업관리(설계감리) 용역자((주)제일엔지니어링) 검토결과

❍ 준공기한 연기 : 90일

- 용역기간 : 당초 ′17. 8. 7.~′19. 2 . 2 8.⇒ 변경′17.8.7.~′19.5.31.

❍ 귀책소재 : 서울특별시

❍ 지체상금 : 미부과

❍ 변경사유 : 경찰청 및 상수도사업본부 요구사항, 지자체 민원 의견반영에 따른 선형변경, 연결로 추가설계에 따른 변경사항 발생으로 반영기간 필요

□ 조치의견

❍ 상기 건설사업관리(설계감리) 용역자의 검토결과가 적정함으로 준공기한 연기처리

붙임 : 1. 설계감리자 준공기한 연기요청에 대한 검토의견 공문 1부.

2. 설계감리자 검토 의견서 1부.

3. 설계용역자 준공기한 연기요청 1부.

4. 예정공정표 1부.

5. 합의각서 1부.  끝.