＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신	(주)세광티이씨 대표자 고성명 귀하
(경유)
제목	154kV 전기설비 유지관리 지원 상주 용역 계약연장 동의 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 정수센터에서 귀사와 수의계약으로 체결하여 진행 중인 「154kV 전기설비 유지관리 지원 상주 용역」건에 대하여 아래와 같이 계약연장을 하고자 하오니 검토 후 동의하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 154kV 전기설비 유지관리 지원 상주 용역

나. 계약금액 : 금9,823,000원(금구백팔십이만삼천원)

다. 계약기간 : 2019.01.02. ~ 2019.03.02.

라. 변경내용 : 현 우리 센터 내 상주기술자를 15일 연장 배치

- 계약기간 연장

구 분	용 역 기 간	증·감
당 초	2019.01.02. ~ 2019.03.02.(60일)	-
변 경	2019.01.02. ~ 2019.03.17.(75일)	증)15일

- 계약금액 변경(부가세 포함_※상세내역은 설계변경서 참조)

구 분	계 약 금 액	증·감
당 초	금9,823,000원
변 경	금12,254,000원	증)2,431,000원

- 변경사유 : 암사아리수정수센터 내부 사정에 따른 업무공백을 차단하기 위함임.  끝.

							암사아리수정수센터소장
주무관							박희정			주무관					김희수					정수시설과장					02/27 양영민
협조자				주무관						김희송
시행			정수시설과-2036									(						)		접수											(						)
우	05205					서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)															/
전화		02-3146-5773						/전송			02-3146-5707					/	pakei27@seoul.go.kr												/	부분공개(2 5)