문서번호	시설과-1345
결재일자	2019.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
전문관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
서동민	한상길	오임석	심상원		02/28 송천헌
협 조
	조경과장			강인호
	동물복지2과장			송부용
	주무관			최수영

『2019년 서울대공원 풍수해 대비』

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비 계획

2019. 2.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『2019년 서울대공원 풍수해 대비』

수방시설 및 수해취약지역 일제점검․정비 계획

2019년도 우기에 대비하여 공원내 각종 수방시설물과 공사장 및 축대, 옹벽, 급경사지 등 수해취약에 대한 일제점검을 실시하고 정비를 완료하여 풍수해를 예방하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 『2019년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약 지역 일제점검 시행』

하천관리과-2155(‘19.2.18)

Ⅱ		점검대상

□ 하천 및 수방시설물

◦ 소하천 : 4개소(금붕어광장연못, 조절저수지, 자연캠프장, 서울랜드)

◦ 제  방 : 2개소(금붕어광장연못제방, 조절저수지제방)

◦ 하수암거 : 4개소(반도지암거,해양관암거,저수지암거,큰물새장암거)

◦ 하수도 : 45.08km (우수 : 31.39㎞, 오수 : 13.69㎞)

◦ 우․오수맨홀 : 498개소

◦ 빗물받이 : 537개소km

◦ 오수처리장 : 1개소

□ 취약시설·지역

◦ 공사장

▷ 서울랜드 주변 노후시설물 환경개선공사 등 3건 ⇒ 시설과

◦ 사면시설 : 사방시설, 절개지, 산사태․낙석 우려지역, 축대, 옹벽 등 ⇒ 조경과

◦ 지하시설 : 동물원 및 호수순환 지하구 등 ⇒ 시설과

◦ 유수 장애시설

▷ 하천 및 하수관거내 퇴적물 등 유수장애 시설 ⇒ 시설과

▷ 산림내 숲가꾸기 부산물 등 ⇒ 조경과

Ⅲ		추진계획

□ 점검 및 정비 기간 : 2019. 3. 1 ~ 2019. 4. 30

점검계획 수립 및 대상파악 제출 (2.28까지 제출)		1차 점검 시 행 (3.1~3.30)		지적사항 보완조치 (3.4~3.30)		조치결과 제출 (4.5까지)
[총괄부서]		[담당부서]		[담당부서]		[총괄부서]
2차 집중점검시행 (1차점검시 미 조치사항 위주) (4.1~4.26)		지적사항 정비완료 (4.8~4.30)		조치결과 제출 (5.7까지)
[담당부서]		[담당부서]		[총괄부서]

※ 총괄부서 : 시설과

※ 담당부서 : 시설과, 조경과

□ 단계별 점검 및 정비(세부)

【1차 점검 및 정비】

◦점검책임자 : 담당과장

◦기  간 : 2019. 3. 1 ~ 3. 30까지

▷ 시설물 및 공사장 담당부서장 주관, 전문가 등과 대상파악 및 점검․정비

▷ 경미한 사항은 현장에서 즉시 정비조치

【2차 점검 및 정비】

◦점검책임자 : 대공원장

◦기  간 : 2019. 4. 1 ~ 4. 26까지

▷ 대공원장, 관리부장, 담당과장, 전문가 등 합동점검

▷ 2019. 4.30까지 1․2차 점검시 지적사항 전체 정비완료

▷ 우기전 또는 해빙기전 정비가 곤란할 경우 별도 정비계획 수립 시행

□ 풍수해 대비 모의훈련 실시

【풍수해 대비 모의훈련 개요】

◦훈련총괄 : 관리부장

◦목적 : 집중호우 대비 동물사 및 건물 침수피해 초기대응 능력 함양

◦일시 및 장소 : 2019. 3.15(금) 16:00~17:00. 대동물관 및 소하천

◦훈련인원

- 시설과 : 공무원5명, 공무직 10명

- 동물복지2과 : 대동물관 관리 사육사 4명

◦내용 : 집중호우로 인한 시설물 침수시 긴급대처 방법

수방장비 작동요령 교육 및 작동상태 점검

Ⅳ		행정사항

□ 점검대상, 지적사항 및 조치결과 제출

◦ 총괄부서(시설과)에서 자료수합 작성 및 본청 제출

- 점검계획 수립 후 방침서 및 대상현황 제출 : 2019. 2.28(목)

☞ 1차 지적사항 및 조치결과는 4.3(수)까지 시설과에서 수합 후 제출
☞ 2차 지적사항 및 조치결과는 5.3(금)까지 시설과에서 수합 후 제출
◦ 점검결과 중대한 결함사항 조치

- 구조적 균열, 붕괴, 전도 등의 징후가 발견 될 경우 응급조치 및 대책마련

☞ 필요시 재난관리기금 등을 활용하여 우기전까지 완료될 수 있도록 조치

첨 부 : 1. 점검대상 현황 1부.

2. 일제점검 및 정비결과 제출서식 1부.  끝.