문서번호	방재시설부-2752
결재일자	2019.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
김현곤		오춘섭	전결 02/28 이임섭
협조
	주무관		이원영

- 남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장) -

조경부분(소방재난본부 문주 및 플랜터 보완) 실정보고 검토보고

2019. 2.

- 남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장) -

조경부분(소방재난본부 문주 및 플랜터 보완) 실정보고 검토보고

「남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)」의 소방재난본부 조경공사 중 문주설치를 위한 구체 보완과 플랜터 배수에 대한 실정보고에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거: 남산예장 감리 제2019-078호(2019.02.26.)

Ⅰ

공사개요

□ 공 사 명:「남산예장자락 재생사업(공원 및 주차장)」

□ 위    치: 중구 예장동 4-1번지 일대(23,494㎡)

□ 도 급 비: 32,485백만원(조경: 5,248백만원)

□ 시 공 사: 갑을산업개발㈜, 효림종합㈜, 동원건설㈜, 안산조경건설㈜

□ 공사기간: 2017.08.31. ~ 2019.12.31.

Ⅱ

보고내용

1.  소방재난본부 문주

○ 변경사유

- 문주 상단에 2톤 정도의 해태상이 설치되는 구조임에 따라 설계사에 구조검토결과를 요구한 결과 당초보다 보강이 필요한 실정임.

※ 철근간격 변경 (@250㎜ → @200㎜), 기초 깊이 증가 (H=0.58M → H=0.9M)

- 합판거푸집의 수량산출에 오류가 있어 이를 정정함.

○ 상세도

구 분	당 초	변 경	비 고
돌담 단면도

○ 공종 및 수량증감 현황

구 분	규 격	당 초	변 경	증 · 감	비 고
문주-1	10,800×1,200×1,350	2개소	0개소	-
문주-1	10,800×1,200×1,350	0개소	2개소	-

2.  소방재난본부 플랜터

○ 변경사유

- 플랜터의 경우 원활한 배수 및 수목하자 방지를 위한 배수판과 부직포설치가 불가피함

○ 설치장소

○ 공종 및 수량증감 현황

구 분	규 격	당 초	변 경	증 · 감	비 고
배수판	T35	0	77㎡	77㎡
부직포	300g/㎡	0	77㎡	77㎡

□ 전체 계략공사비 증감 현황                           (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
소방재난본부 리모델링
가. 문 주	4,588	3,808	△ 780
나. 배수판	-	835	835
다. 부직포	-	81	81
직접공사비	4,588	4,724	136
간접공사비	2,809	2,752	△ 57
계	7,397	7,476	79
관급자재비(문주, 화강석 판석)	31,735	31,865	130
총 공사비	39,132	39,341	209

Ⅲ

책임건설사업관리기술단 검토의견

○ 소방재난본부 리모델링 공사의 문주설치는 구조계산에 의하여 보강하기 위함이며, 수목의 하자예방을 위하여 배수판, 부직포 설치 실정보고는 적정한 것으로 판단됨.

○ 실정보고 적용단가는 기 설계변경 시 적용한 산출단가 반영으로 공사비를 산출하였음.

○ 이에 따른 공사비는 추후 설계변경 시 반영함이 적정한 것으로 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 본 실정보고는 현장 여건이 적절히 반영되지 않은 부분을 수정 및 보완한 것으로 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단됨.

○ 실정보고 승인통보하여 현장 반영 조치코자하며 공사비에 대하여는 추후 설계변경하여 반영코자 함.

붙임  건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.