문서번호	도로보수과-1176
결재일자	2019.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
박해웅	김유찬	02/28 송만규
협 조

2019년 굴착복구사업 추진계획

2019. 2.

동부도로사업소

(도로보수과)

<안전하고 편안한 도로환경 제공을 위한>

2019년 굴착복구사업 추진계획

우리 사업소에서 유지관리하고 있는 포장도로의 굴착복구 공사와 시행도로정비공사에 대한 사업 추진계획을 수립하여 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공코자 함.

	1		추 진 방 향

❍ 안전하고 쾌적한 도로․교통환경 제공으로 대시민 행정서비스 향상

❍ 시민을 최우선으로 생각하는 효율적 업무 추진으로 공사중 시민        불편 최소화 및 예산 절감

	2		굴착복구기금 재배정 현황

(단위:천원)

구 분	계	직접복구비	간접복구비	비 고
도로굴착복구 기금	4,852,000	4,215,000	637,000	2.26. 배정완료

	3		공사별 세부 추진계획

□ 기본 방향

❍ 도로 유지관리 측면을 고려하여 가급적 차로단위복구 시행

❍ 소규모 굴착구간은 표층확폭복구 시행으로 공용수명 연장 도모

❍ 원인자복구 확대 시행으로 과다 설계변경 지양

❍ 폐아스콘 처리용역과 노면표시 도색공사는 별도 분리발주

❍ 굴착복구 시행도로 정비공사는 별도 발주

□ 예산 사용 계획

(단위:천원)

합 계	굴착복구 공사	노면표시 공사	폐아스콘 처리	시행도로 정비
4,852,000	3,615,000	369,000	300,000	568,000

※ 차로단위복구 및 시행도로정비 공사 후 포장면과 맞지 않는 불량맨홀은 전문성

확보 및 품질관리 등을 위해 ‘불량맨홀 정비공사’에서 일괄 정비 시행

□ 사업별 공사 세부추진 일정

사 업 명	설 계	계약심사,일상감사	발 주	계 약	착 공
굴착복구공사	‘19.02.20.	‘19.03.05.	‘19.03.08.	‘19.03.23.	‘19.03.25.
노면표시 도색공사	‘19.03.05.	비대상	‘19.03.08.	‘19.03.23.	‘19.03.25.
폐아스콘 처리용역	‘19.02.21.	‘19.02.25.	‘19.03.08.	‘19.03.23.	‘19.03.25.
시행도로 정비공사	‘19.02.28.	비대상	‘19.03.05.	‘19.03.20.	‘19.03.23.

	5		행 정 사 항

❍ 공사발주 전 계약심사, 일상감사 및 전문공사 발주사업 사전검토 의뢰

붙임 1) 시행도로정비공사 위치도 1부.

2) 굴착복구기금 재배정내역서 1부.

3) 2019년 도로굴착 심의 조정 현황 1부.

4) 설계도서 각 1부.  끝.