문서번호	도시철도사업부-1799
결재일자	2019.2.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
정영호		최문기	02/28 최병훈
협 조
	주무관			박형복
	주무관			원길묵

- 신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구) -

휴일 및 야간 감리 근무계획 승인 검토 보고(´19년 3월)

2019. 2.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

휴일 및 야간 감리 근무계획 승인 검토 보고(´19. 3월)

신림선 도시철도 민간투자사업 건설공사(3공구) 관련 ´19년 3월 휴일 및 야간 감리 근무계획 승인 요청에 대하여 검토 보고 드림

1				휴일 및 야간근무 승인 요청내용

관련 근거 : 신림신성-2019-093호(´19. 2. 26.) … #붙임1

휴일 근무 : 총 6일

- 3.1(금), 3.2(토), 3.9(토), 3.16(토), 3.23(토), 3.30(토)

야간 작업 : 3. 1. ~ 3. 30. (미시행 : 매주 일요일)

2				휴일 및 야간 근무 계획

관련근거

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제3장 제5절 4.0 (휴일 및 야간작업)

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제5장 제2절 6.2.2 (휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급)

- 신림선 책임감리 입찰안내서 제5장 제2절 6.2.3 (휴일 및 야간작업 근무 요령)

휴일 및 야간 근무 사유

【휴일 근무】

- 교통소통 조기 정상화 등 원활한 공정추진(109,110정거장, #4작업구)및 터널 굴진․지보재 설치(#4작업구, 110E환기구, 111정거장) 위해 연속적인 작업을 시행해 교통소통 조기 정상화 및 시민불편 해소에 만전

【야간 근무】

- 작업내용 : 터널 굴진․지보재․천공 작업 등(110E환기구, 111정거장, #4작업구)

- 작업사유 : 공정목표 달성 및 터널작업 사이클 타임 확보

적정성 및 비용 부담

【휴일 근무】

- 휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(도시철도토목부-10681, ´13.11.14.)

□휴일근무 대가는 귀책사유에 따라 지급 ⇨ 시공사 귀책은 시공사에서 대가 지급

- 건설사업관리기술단 검토 의견

□휴일작업 사유 : 시공사 귀책으로 인한 휴일근무 임을 명기(시공사)

【야간 근무】

- 야간근무는 주․야간으로 산출된 공사비에 의거 감리대가를 산출하였으므로 추가지급 제외 (입찰안내서 제6장 6.2.1)

- 용역계약일반조건 Ⅴ.4.나항목 단서조항에 의한 작업일 경우 감리원은 대체휴무하고 근로기준법에서 정한 1.5배의 기준은 적용하지 않는다.

□용역계약일반조건 Ⅴ.4.나 : 계약상대자는 발주기관과 협의하여 야간작업을 하는 경우 추가비용을 청구할 수 없다.

개정된 근로기준법에 따른 주간 적정 근로시간(52시간) 준수 : 적정 … #붙임2

휴일 및 야간 근무 주요내용

【휴일 근무】

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용		근무자
3. 1.(금)	주간 (건설사업관리기술자 1인)	109정거장	∘토공 굴착 및 띠장 설치 등	***
		#4 작업구	∘터널 굴진 및 지보 설치 등
		110정거장	∘H-pile 천공 준비 작업
		110E환기구	∘터널굴진 및 지보설치 등
		111정거장	∘터널굴진 및 지보설치 등
3. 2.(토)	주간 (건설사업관리기술자 1인)	109정거장	∘토공 굴착 및 띠장 설치 등	***
		#4 작업구	∘터널 굴진 및 지보 설치 등
		110정거장	∘H-pile 천공 준비 작업
		110E환기구	∘터널굴진 및 지보설치 등
		111정거장	∘터널굴진 및 지보설치 등

근무일자	근무형태	시공사 휴일작업 주요내용		근무자
3. 9.(토)	주간 (건설사업관리기술자 1인)	109정거장	∘토공 굴착 및 띠장 설치 등	***
		#4 작업구	∘터널 굴진 및 지보 설치 등
		110정거장	∘H-pile 천공 및 항타
		110E환기구	∘터널굴진 및 지보설치 등
		111정거장	∘터널굴진 및 지보설치 등
3. 16.(토)	주간 (건설사업관리기술자 1인)	109정거장	∘토공 굴착 및 띠장 설치 등	***
		#4 작업구	∘터널 굴진 및 지보 설치 등
		110정거장	∘H-pile 천공 및 항타
		110E환기구	∘터널굴진 및 지보설치 등
		111정거장	∘터널굴진 및 지보설치 등
3. 23.(토)	주간 (건설사업관리기술자 1인)	109정거장	∘토공 굴착 및 띠장 설치 등	***
		#4 작업구	∘터널 굴진 및 지보 설치 등
		110정거장	∘H-pile 천공 및 항타
		110E환기구	∘터널굴진 및 지보설치 등
		111정거장	∘터널굴진 및 지보설치 등
3. 30.(토)	주간 (건설사업관리기술자 1인)	109정거장	∘토공 굴착 및 버팀보 설치 등	***
		#4 작업구	∘터널 굴진 및 지보 설치 등
		110정거장	∘H-pile 천공 및 항타
		110E환기구	∘터널굴진 및 지보설치 등
		111정거장	∘터널굴진 및 지보설치 등

【야간 근무】

근무일자	근무형태	구간	근무자	작업내용
3월 1주차 (3.1.~3.2.)	야간 (건설사업관리기술자 1인)	110E환기구 111정거장	*** ******	· 버럭처리, 지보설치 · 숏크리트, 발파천공 · 락볼트, 화약장약
		#4작업구	*** ******	· 지보설치 · 숏크리트, 발파천공 · 락볼트, 화약장약

근무일자	근무형태	구간	근무자	작업내용
3월 2주차 (3.4.~3.9.)	야간 (건설사업관리기술자 1인)	110E환기구 111정거장	*** ***********	· 버럭처리, 지보설치 · 숏크리트, 발파천공 · 락볼트, 화약장약
		#4작업구	*** ******	· 지보설치 · 숏크리트, 발파천공 · 락볼트, 화약장약
3월 3주차 (3.11.~3.16.)	야간 (건설사업관리기술자 1인)	110E환기구 111정거장	*** *************	· 버럭처리, 지보설치 · 숏크리트, 발파천공 · 락볼트, 화약장약
		#4작업구	*** *******	· 지보설치 · 숏크리트, 발파천공 · 락볼트, 화약장약
3월 4주차 (3.18.~3.23.)	야간 (건설사업관리기술자 1인)	110E환기구 111정거장	*** *************	· 버럭처리, 지보설치 · 숏크리트, 발파천공 · 락볼트, 화약장약
		#4작업구	*** *******	· 지보설치 · 숏크리트, 발파천공 · 락볼트, 화약장약
3월 5주차 (3.25.~3.30.)	야간 (건설사업관리기술자 1인)	110E환기구 111정거장	*** *************	· 버럭처리, 지보설치 · 숏크리트, 발파천공 · 락볼트, 화약장약
		#4작업구	*** *******	· 지보설치 · 숏크리트, 발파천공 · 락볼트, 화약장약

3				검토 결과

작업의 연속성과 원활한 공정추진을 위하여 아래와 같이 휴일 및 야간 작업 승인조건을 부여하고 건설사업관리기술자 근무 계획을 승인코자 함.

< 건설사업관리기술자 휴일 및 야간 작업 승인조건 >

- 휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자 대가는 시공사에서 부담

- 야간작업에 소요되는 건설사업관리기술자 추가 대가 제외

- 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

- 소음․먼지․통행 불편 등 불편사항이 없도록 하고 보행자 및 차량 안전사고 주의할 것

- 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것

- 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독할 것

< 업무지시 >

- 공사장내 추락 관련 사항 안전관리 강화

- 건설사업관리기술자는 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리, 민원관리 등 철저

- 건설사업관리기술자 및 현장 공사관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

- 휴일 및 야간 작업계획의 변경시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업시행토록 할 것

- 사고 발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련절차에 따라 상황 보고토록 할 것

- 작업구간 정기순찰 점검실시 : 도로침하 및 파손 점검, 화재예방 점검 등

- [근로자 안전 10계명], [안전시공 10대 항목] 준수 철저

붙  임 : 1. 휴일 및 야간 감리 근무계획 승인 요청 공문 1부

2. 3월 감리원 근무 계획(주 52시간 준수).  끝