문서번호	설비부-2769
결재일자	2019.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	건축설비과장	설비부장	시설국장		도시기반시설본부장
이강욱	김은덕	임정규	이택근		02/28 한제현
협 조
	재무예산과장			홍수열
	주무관			백남진

『서울의료원 권역응급의료센터 증축 공사』

설비분야 공사 발주 계획

2019.02

도시기반시설본부

(설 비 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『서울의료원 권역응급의료센터 증축 공사』

설비분야 공사 발주 계획

중증응급환자 최종 치료를 위한 응급 인프라 확충을 위해『서울의료원 권역응급의료센터 증축 공사』의 설비분야(기계,전기,통신) 공사 발주계획 보고임.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계(전기,통신)공사

□ 위    치 : 중랑구 신내동316(신내로 156)

□ 공사내용

- 기계 : 위생, 냉난방, 자동제어, 소방설비, 지열시스템, 승강설비 등

- 전기: 수변전설비, 전력간선,  태양광발전, 전등/전열 등 기타 전기 1식

- 통신: CCTV설비, 방송설비공사, 너스쿨설비 등 기타 통신 1식

□ 공 사 비 : 8,735백만원 (기계 5,451, 전기 2,274, 통신 1,010)

□ 설 계 자 : ㈜기술사사무소 지맥(기계), ㈜동도이엔씨(전기),(주)한빛안전기술단(소방)

□ 공사기간 : 착공일로부터 18개월

□ 사업 의뢰부서 : 시민건강국 의료정책과

□ 조감도 및 위치도

조 감 도	위 치 도

2		추진경위

□ ‘16. 05. 10 : 서울의료원 권역응급의료센터 건립계획(보건의료정책과)

□ ‘17. 05. 22 : 설계용역 계약(건축부)

□ ‘18. 10. 12 : 설계 VE·계약심사 통합심사 결과통보

□ ‘18. 10. 31 : 설계용역 완수

□ ‘19. 02. 11 : 계약심사결과 통보

□ ‘19. 02. 14 : 건설사업관리용역 계약(감독권한대행 등 포함)

□ ‘19. 02. 14 : 일상감사결과통보(감사위원회)

※건축분야 공사계약 : 2018. 12. 28

3		공사발주 현황

□ 현 황

□ 공사기간 : 총차 18개월(1차 : 착공일로부터 2020.02.28까지)

□ 예산집행 계획

- 공종별 공사비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	총 공사비	도 급 비	관급자재비	이전비 등
총 계	8,735	5,734	2,886	115
기 계	5,451	3,507	1,888	56
전 기	2,274	1,545	670	59
통 신	1,010	682	328	-

※ 1) 기계□전기분야 소방공사는 기계공사에 포함됨.

단) 기계소방공사는 기계담당, 전기소방공사는 전기담당이 업무(감독)처리.

※ 2) 기계 1차 도급비 800백만원, 전기 1차 도급비 700백만원, 통신 1차 도급비 250백만원.

- 연도별 집행계획

(단위 : 백만원)

구 분 년도별	합계	기 계	전 기	통 신
계	8,735	5,451	2,274	1,010
2019년 예산	4,691	2,744	1,370	577
2020년 예산	4,044	2,707	904	433

□  예산과목

- 시민건강국 보건의료정책과, 공공보건·의료분야 대시민 서비스 수준향상, 공공의료기관 관리 및 운영 개선, 서울의료원 권역응급의료센터 건립, 시설비 및 부대비, 시설비.

□  직접시공 업종

기계설비공사			전기설비공사	통신공사
기계설비	소방	가스	전기
○	○	○	○	○

4		공사발주 계획

□ 발주방법 : 기계, 전기, 통신공사 각각 분리 발주 시행

- 소방공사는 기계분야에 포함하여 발주(분담이행 가능).

- 관련근거

① 기계설비공사 분리발주 방침(설비부-1118, 2012.2.6.)

□ 주계약자 공동도급 활성화 방안(건설혁신과-1388, 209.02.01)

⇨ 특별한 경우 해당하는 사업 : 분리발주 대상사업(전기,통신,기계설비 등)

② 전기공사업법 제11조(전기공사 및 시공책임형 전기공사관리의 분리발주)

③ 통신공사업법 제25조(도급의 분리)

□ 공고방법 : 긴급 입찰공고 시행

- 관련근거 : 지방계약법 시행령 제35조제4항3호

□ 계약방법 : 장기계속계약

□ 입찰방법 : 제한입찰

- 기계공사 : 지방계약법 시행규칙 제25조제2항2호에 의거 시공실적(금액) 제한(추정가격의 3분의 1이상)

- 전기□통신공사 : 지방계약법 시행규칙 제25조제2항2호에 의거 시공능력 평가액 제한(시공능력 평가액이 추정가격의 1.9배 이상).

- 입찰 참가자격 세부내용

분야	기계(소방포함)	전기	통 신
자격 (면허)	-입찰참가신청 서류 접수마감일까지‘건설산업기본법’에 의한 전문건설업[기계설비공사업]과 [가스시설공사업(1종)] 과‘소방 시설 공사업법’에 의한 [기계⋅전기분야 전문 또는 일반 소방 시설 공사업]을 모두 등록한 업체 -기계설비공사업만을 소지한 업체가 자격보완을 위하여 가스시설공사업(1종)과 기계⋅전기분야 소방 시설 공사업(전문 또는 일반) 등록업체와 공동도급 가능(분담이행방식)	-전기공사업법 의한 전기공사업 면허를 보유한 업체	-정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 등록 업체
입찰 참가 제한	-주계약자는 입찰공고일 전일까지 최근 5년 이내 건축법령상 의료시설 단일건축물 또는 증축공사 단일건의 기계설비공사 준공금액이 1,062백만원 이상 실적을 보유한 업체이어야 함.	-입찰참가신청 마감일 기준 시공능력 평가액이 2,668백만원 이상인 업체이어야 함.	-입찰참가신청 마감일 기준 시공능력 평가 액이 1,180백만원 이상인 업체이어야 함.
공동 도급	-공동이행 및 분담이행 방식의 공동도급이 가능함 -공동수급체 수는 대표사 포함 4개사 이내로하여야 함(전기□통신공사는 2개사 이내) -공동수급체 대표는 출자비율 비중이 많은 업체이어야 한다. 다만, 공동이행방식으로 공동수급체 구성 시 구성원별 계약참여 최소 지분율은 5%이상이어야 하며, 참여한 구성원은 분담이행방식으로 참여할 수 없음.
지역 의무 공동 도급	-입찰공고일 전날부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울시에 주된 영업소를 둔 자(지역업체)를 반드시 공동수급체 구성원으로 하여야 함 -지역업체 최소 참여비율은 49% 이상이어야 함. 다만, 지역업체가 입찰참가 자격요건을 모두 갖춘 경우 단독 입찰 가능함. -지역의무공동도급에 따라 공동수급체를 구성하는 경우 해당 지역 업체와 그 외 지역 업체 간에는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사(상호출자제한 기업집단 소속)가 아니어야 함.

□ 현장설명 : 생략(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제15조 제3항)

□ 낙찰자 결정

- (행정안전부 예규) 제2장, 시설공사 적격심사 세부기준 적용

□ 하자보증기간 : 각 개별 법령에 정한 기준에 의함

- 기계설비공사, 가스공사 : 건설산업기본법 시행령 제30조 및 별표 4

- 전기공사 : 전기공사업 시행령 제11조의2 및 별표 3의2

- 통신공사 : 정보통신공사업법 시행령 제37조

- 소방공사 : 소방시설공사업법 시행령 제6조

5		관급자재 구매

□ 구매계획

- 시행방법 : 조달사업에 관한 법률 제5조의2(계약체결의 요령) 및 동법 시행령 제9조의3제1항에 의거 조달구매 시행.

- 품목별 구매 계획.

분야별	품 목	구매방법	발주시기	비 고
기계	*****	******* *******	2019.03월
	*******	****	2019.03월
	****	****	2019.03월
	***	*****	2019.03월
	******	*****	2019.03월
	*****	*****	2019.03월
전기	***********	*****	2019.04월
	****	****	2019.03월
	***	*****	2019.04월
	*****	*****	2019.04월
	***	*****	2019.03월
통신	****	****	2019.04월
	****	*****	2019.04월
	****	*****	2019.04월

※관급자재 구매시기 등은 현장여건에 따라 변경될 수 있음.

6		행정사항

□ 추진일정

- 2019.03월 초순 : 공사(기계, 전기, 통신) 발주 의뢰

- 2019.03월 말   : 공사(기계, 전기, 통신) 계약

- 2019.04월 초순 : 공사 착공

- 2020.09월      : 공사 준공 예정

□ 협조사항

- 재무과(시 본청) : 공사 발주 건은 긴급입찰 공고하여 계약 완료

붙임 : 1. 공사설명서(기계,전기,통신) 각 1부.

2. 긴급 입찰공고(기계,전기,통신) 사유서 각 1부.   끝.