문서번호	시설관리과-4837
결재일자	2019.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강정구		김대용	02/28 천성훈
협조

시설물공사 연기보고서(시설물 1, 5, 6번)

2019. 2.

동부수도사업소

명에 의거 중랑‧동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 업무 수행 중 공사기간 연기 사유가 발생하여 아래와 같이 보고 드립니다.

□ 현  황

❍ 공 사 명: 2018년 중랑‧동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

❍ 도 급 자: 성신진흥산업개발(주) 대표 김보민

❍ 관련 작업지시

- 작업지시번호:  시설 1, 5, 6번

- 공사기간: 2019. 1. 16. ~ 2019. 2. 28.

□ 보고내용

❍ 시설물 순찰 및 합동점검시 지적된 사항을 아래와 같이 2019.1.15. 작업지시하여 굴착작업이 불필요한 건은 완료하였으나, 동절기 추위로 인해 굴착작업이 불가하여 작업을 완료하지 못한 건이 있음.

작업 지시	위 치	공 종	규 격	수량	조치 내용	비고
*	********	********************	*	*	*************	***
*	********	******	*	*	****	****
*	********	****	*	*	****	****
*	*********	****	******	*	****	**
*	**********	****	***	*	*************	**
*	**********	****	***	*	*************	**

□ 처리의견

❍ 위와 같은 사항으로 작업기한을 아래와 같이 연기하여 시설물 유지관리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 당초: 2019. 1. 16. ~ 2019. 2. 28.

- 변경: 2019. 1. 16. ~ 2019. 3. 30.  끝.