문서번호	시설관리과-3997
결재일자	2019.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
양창진	정진호	이경희		02/28 배현숙
협 조

『2018년 가압장 등 모터펌프 수리(장기계속계약)』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2019. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2018년 가압장 등 모터펌프 수리(장기계속계약)』

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

「2018년 가압장 등 모터펌프 수리(장기계속계약)」에 대한 설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2018년 가압장 등 모터펌프 수리(장기계속계약)

○ 계 약 자 : ㈜에스피케이 대표 김권희

○ 계약기간 : ’18.4.12. ~ ’19. 3. 31.

○ 계약금액 : 금56,084,000원

○ 사업규모

- 신정가압장 등 3개소 모터펌프(5대) 수리

- 전동구동장치 교체 등 기타부대설비 수리 1식

□ 설계변경 내역

○ 계약물량 증감

공 종	규 격	단위	당초수량	변경수량	비고(증감)
스테인레스 강판	3t	ton	0.21	0.05	감)	0.16
잡철물제작설치	보통구조	ton	0.21	0.05	감)	0.16
고재처리	고철	kg	434	409	감)	25
배수펌프 철거 및 교체	0.75Kw	대	4	2	감)	2
고정형 사다리 설치	무인증압용,STS	개소	0	2	증)	2

○ 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감		비 고
총부기금액		56,084,000	55,869,000	감)	215,000
1차수	’18년 계약금액	52,162,000	52,162,000		0	기성분
2차수	’19년 계약금액	3,922,000	3,707,000	감)	215,000

□ 설계변경 심의

○ 심의일시 : ’19. 2.28.(목) 10:00 4층 회의실

○ 심의내용 및 결과

- 설계변경 타당 여부 : 타당함

- 신규공정 적정 여부 : 적정함

- 공정별 계약물량 증감 및 계약단가 적용 적정 여부 : 적정함

- 제경비 적정 산정 및 적용 적정 여부 : 적정함

□ 행정사항

○ 설계변경 시행 후 우리 사업소 행정지원과에 변경계약 의뢰

붙임 : 1. 설계변경 심의결과서 1부

2. 설계변경 내역서 각1부.   끝.