“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(준공기한 연기)

우리과에서 시행 중인 ‘광운대역~월계로간 도로개설 외 1건 타당성조사 용역 ’에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 광운대역~월계로간 도로개설 외 1건 타당성조사 용역

2. 계 약 자 : 극동엔지니어링 주식회사

3. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경	비 고
준공 기한	2019년 3월 4일	2019년 5월 3일

4. 귀책사유 : 서울특별시

5. 연기사유 : 용역 성과품의 완성도 제고를 위한 관련 기관(부서) 협의, 타당성 조사 보완 등을 위하여 과업 기간 연장

붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기방침서 1부.

3. 변경 합의각서 1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	장연수		광역도로계획팀장	김경근		도로계획과장	02/28 안대희
협조자	계약1팀장	조현
시행	도로계획과-2884	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 본관 10층 도로계획과	/
전화	02-2133-8087	/전송	02-2133-0763	/	crow2258@seoul.go.kr	/	대시민공개