문서번호	방재시설부-2864
결재일자	2019.3.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		진재섭	03/04 이임섭
협조
	주무관		김상용

「신상도 지하차도 확장공사」

건설폐기물 처리용역 발주계획

2019.3.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「신상도 지하차도 확장공사」

건설폐기물 처리용역 발주계획

우리 본부에서 추진 중인「신상도 지하차도 확장공사」의 건설폐기물 처리용역을 다음과 같이 발주하고자 함.

1		용역개요

❍ 용 역 명 : 신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역

❍ 위    치 : 서울특별시 동작구 상도동 159-21~207-5

❍ 용 역 비 : ********************

❍ 용역기간 : ***********

❍ 용역내용 : 건설폐기물의 운반 및 처리(※ 스마트 송장 적용)

- **************************************************

❍ 추진근거 :「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」제15조 및 시행령 제11조에 따라 100톤 이상의 건설폐기물의 건설공사와 분리하여 발주

2		추진경위

❍ `07.12.31. : 공사 계약 및 착수

❍ `10.12.3.   : 우회도로부지 미확보로 공사 중지(1차)

❍ `14.3.13.   : 상도7구역 재개발정비구역 지정해제

❍ `15.3.1.    : 철거대상 건물 미이주로 공사 중지(2차)

❍ `17.1.~    : 추가 보상절차 이행으로 공사 중지(3차)

❍ `18.10.4.    : 대광·청학빌라 수용재결 보상금 공탁

❍ `19.2.26.    : 건설사업관리용역 계약

3		건설폐기물 처리용역 발주계획

❍ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

❍ 입찰참가자격

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 따라 자격요건을 갖추고 다음 각 호에 해당하는 업체

· 지역제한 : 입찰자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지, 낙찰자는 계약체결일까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

· 보유면허 :「폐기물 관리법」제25조,「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」제21조 규정에 의한 건설폐기물 수집·운반업과 건설폐기물 중간처리업 허가를 모두 득한 업체

· 공동도급 : 자격 보완을 위하여 건설폐기물 수집·운반업 허가만 득한 업체는 서울특별시 또는 경기도 또는 인천광역시에 소재한 건설폐기물 중간처리업체와 공동도급(분담이행방식)이 가능하며, 이 경우 대표자는 서울특별시에 소재한 폐기물 수집·운반 업체이어야 함

❍ 예산과목 : 안전총괄실 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별), 신상도 지하차도 확장, 시설비

4		향후계획

❍ `19. 3. : 계약심사 및 용역 계약 의뢰

❍ `19. 4. : 용역 계약 및 착수

❍ `20.12. : 용역 준공

붙 임 : 1. 설계내역서 1부

2. 과업내용서 1부.  끝.