투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	극동엔지니어링(주) 대표이사 귀하
(경유)
제목	건설사업관리용역(전체분, 1차분) 착수일 조정 통보

1. 귀 사와 장기계속사업으로 계약 체결(2019.2.26.)하여 시행 중인『신상도 지하차도 확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역』과 관련입니다.

2. 본 용역은 당초 2019.3.4.부터 착수 예정으로 계약되었으나, 현재 사업구간 내 지장가옥 주민 이주가 완료되지 않았고 상도역 지역주택조합사업 아파트 신축공사 현장에서 우회도로부지를 점유하여 실착공이 어려운 실정인 바, 별도 통보시까지 착수일(투입시기)를 조정하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이시연		방재시설과장	진재섭		방재시설부장	03/04 이임섭
협조자
시행	방재시설부-2856	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	대시민공개