문서번호	시설보수과-462
결재일자	2019.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
최기문	이호복	조선행		03/05 이철범
협 조
	운영과장		최종인

제1처리장 소화조 보수공사 시행계획

2019. 02

난지물재생센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등		■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■	추후 선정 심사위원회 개최예정
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■	발주시 안전관리대책 작성 예정
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

제1처리장 소화조 보수공사 시행계획

□ 우리센터 제1처리장 소화조의 콘크리트 열화 및 노후로 인해 시설물 보수가 필요한 상태이므로 적기에 보수공사를 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1. 추진근거

가. 2017년 정밀점검 및 내진성능평가용역

2. 시설물 현황

가. 규모 및 현황

구분	시설년도	규 모	주요 손상	비고
제1,2처리장 소화조	1994년(#1) 1997년(#2)	직경 26m 높이 12.5m	표면 열화가 진행되고 있으며, 재료 분리 및 균열발생

나. 관련사진

콘크리트 열화	벽체균열

3. 공사개요

가. 공사명 : 제1처리장 소화조 보수공사

1) 사 업 비 : 680,000천원(#1 소화조 2개지)

2) 사업기간 : 2019. 3 ~ 2019. 12(10개월간)

3) 공사내용 : 제1처리장 소화조 보수(2-2-1, 3-2-1)

※ 보수위치는 센터 운영상 변경될 수 있슴

4) 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

4. 단면복구 공법 선정

가. 공법 선정 방법 : 특정제품(공법) 선정 심사위원회를 개최하여 최적의                     공법 선정

1) 특정공법 선정 심사위원회 개최

- 첨부된 단면복구공법 중 특정제품(공법) 선정심사위원회를 개최   하여 우리센터 현장 실정에 맞는 최적의 공법을 선정하여 설계에   반영코자 함.

나. 공법선정시 검토내용

1) 보수 재료의 부착성이 좋을 것

2) 내마모성, 내화학성 등 내구성 우수할 것

3) 시설물 유지관리와 경제성 고려

다. 검토 대상공법(2017년 정밀점검 용역 제안 공법)

- 붙임 검토의견서 참조

※ 위원회 개최시 외부전문가 포함 개최하여 객관적이고 투명한 심사가     되도록 조치 예정

5. 발주방법 및 입찰자격

가. 발주방법 : 제한경쟁입찰(지역)

1) 입찰참가조건

가) 건설산업기본법에 의한 시설물유지관리업 등록업체로서 서울특별시

및 경기도에 주된 사무소가 있는 업체

2) 특허공법

가) 특정공법 선정 심사위원회에서 공법선정 검토대상 : 6개 공법

- HWD공법, H-CRM공법, PA공법, EG PROTECT공법, 프리웨팅공법,   Hi-fer공법

6. 향후계획(안)

가. 2019. 3월 중 : 특정공법 심사위원회 개최

나. 2019. 4월 중 : 공사 발주 및 계약심사, 재무과 계약 의뢰

다. 2019. 4 ~ 12월 : 계약 및 공사시행

※ 특허공법 심사위원회 개최는 개선안 마련 통보시 까지 보류조치【물재생시설과-2255(2019.20】

첨부 : 1) 제1처리장 소화조 보수공사 특허공법 심의 검토대상 자료 1부.

2) 소화조 보수현황 1부. 끝.