문서번호	시설개선과-1942
결재일자	2019.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설개선과장
오상호		03/05 윤정한
협 조
	주무관			이호경

- 2019년 잠실야구장 환경개선공사 -

공사물량 변경 검토보고

2019. 3

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 2019년 잠실야구장 환경개선공사 -

공사물량 변경 검토보고

『2019년 잠실야구장 환경개선공사』와 관련 현장 시공물량 변경에 따른 검토보고 사항임.

공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 잠실야구장 환경개선공사

○ 공사개요

- 노후 외야 안전난간 보수 70개소

- 노후 관람석(레드석) 등·좌판 교체 6,113개소

- 내부 복도 바닥재 개선 550㎡

- 관람석 통로 및 계단 바닥 개선 6,866㎡

- 강화유리 안전난간 설치 100m(조달구매 설치)

○ 사 업 비 : **************

- 도급비 : **************

- 관급비 : ***********(강화유리 안전난간)

○ 공사기간 : 2019. 1.16 ~ 3.18

○ 시 공 사 : ***************

○ 추진경위

- ‘18.  12. 18    발주방침

- ‘19.  01. 04    공사발주

- ‘19.  01. 16    공사계약 및 착공

- ‘19.  02. 07    계약금액 조정(1회) 및 관급자재 수량변경

- ‘19.  02. 25    시공사 실정보고 검토보고 승인

(외야 안전난간 정비 공정 및 수량변경 감액-4,750천원)

- ‘19.  03. 18    준공예정

보고내용

○ 외야관람석 내부연결 계단 바닥정비(논슬립 포함) 추가

- 외야관람석 연결계단 바닥이 노후 및 논슬립 마모가 심해 추가공사 시행

▶ 관람석(바닥)계단 공정 190㎡수량증가(14,845천원 증액)

공 정	수량	단위	단가	금액
바탕처리	190	㎡	6,623	1,258,370
관람석(바닥)계단	190	㎡	48,282	9,173,580
제경비	1	식	4,413,351	4,413,351
계				14,845,301

외야관람석 연결계단	위치도

○ 구단 요구사항(잠운본 제2019-08호(2019.03.05))

- 1,3루 1층 첫 번째 관람석 원활한 통행을 위한 관람석 미설치 요청

▶ 레드석 등/좌판 교체 공장 72개 수량감소(-6,120천원 감액)

공 정	수량	단위	단가	금액
레드석 등/좌판 교체	-72	개	68,166	-4,907,952
제경비	1	식	-1,212,168	-1,212,168
계				-6,120,120

미설치 관람석 위치도	미설치 관람석 위치도

○ 제경비 정산

- 환경보존비 감액 정산

공 정	수량	단위	단가	금액
환경보존비	1	식	-2,978,612	-2,978,612
제경비	1	식	-996,569	-996,569
계				-3,975,181

계약금액 조정

○ 총공사비 증․감 내역(변동없음)

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비		*************	*************	-
도급액	공 급 가 액	*************	*************	-
	부가 가치세	***********	***********	-
	계	*************	*************	-
관급자재비		**********	**********	-

※ 시공사 실정보고 검토보고 반영(시설개선과-1685, ‘19. 2.25)

조치의견

○ 위와 같이 공사물량 변경사항을 최종 변경계약 시 반영코자 함.

덧붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 시공사 실정보고 검토보고서 1부.  끝.