문서번호	한양도성도감-2199
결재일자	2019.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬		곽동진	03/05 진용득
협 조

1차 준공기한 변경검토 보고

(남산 회현자락 한양도성 현장 유적박물관)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3.

문 화 본 부

(한양도성도감)

(1차)준공기한 연기 검토

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관」장기계속 공사의 계약과 관련하여 계약자로부터 1차 준공기한의 변경요청이 있어 검토결과를 보고 드림

Ⅰ		계약내용

□ 계약건명: 남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성공사

□ 계약업체: 원택건설(주), 명헌건설(주)

□ 계약금액: ***************************************

□ 준공기한: 2018.11.23. ~ 2019.11.22. (1차 2019.5.22.)

□ 착공일자: 2018.11.23.

Ⅱ		검토내용

□ 연기기한: 2019. 9.30.(연장 131일)

□ 연기사유 귀책소재: 서울특별시

□ 지체상금 부과여부(부과, 미부과) : 미부과

□ 연기사유

- *******************************************************************************************

Ⅲ		처리의견

□ 준공기한에 차질이 없도록 전체 계약기간의 범위내에서 1차 계약기간을 변경처리 하고자 함

붙임: 감리원 검토의견서 및 1차 준공연기 합의 각서 1부.  끝.