문서번호	청년청-2536
결재일자	2019.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	청년공간조성팀장	청년청(담당관)
박종일	이병구	03/06 김영경
협 조

무중력지대 강남 조성공사 설계변경 및 준공기한 연기 보고

2019. 3.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

무중력지대 강남 조성공사 설계변경 및 준공기한 연기 보고

무중력지대 강남 조성공사 시공사의 실정보고에 따른 설계변경 및 준공기한 연기를 통해 원활한 공사를 추진하고자 함.

I				추진근거		‘

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 제6절 공사설계의 변경

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 제8절 2. 계약기간의 연장

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제15장 제7절 2. 계약기간의 연장

II				계약개요		‘

□ 건축/기계공사

○ 공 사 명 : 서울시 청년공간 무중력지대 강남 신규 조성공사(건축,기계)

○ 계약업체 : 주식회사 대명이십일

○ 계약금액 : *****************************

○ 계약일자 : 2018.11.26.

○ 착공일자 : ***********

○ 준공일자 : *********

□ 전기/소방전기공사

○ 공 사 명 : 서울시 청년공간 무중력지대 강남 조성공사(전기,소방전기)

○ 계약업체 : 시스텍전기통신(주)

○ 계약금액 : *******************************

○ 계약일자 : 2018.12.19.

○ 착공일자 : ***********

○ 준공일자 : *********

□ 통신공사

○ 공 사 명 : 서울시 청년공간 무중력지대 강남 조성 통신공사

○ 계약업체 : 세경네트웍스 주식회사

○ 계약금액 : ************************

○ 계약일자 : 2018.12.14.

○ 착공일자 : ***********

○ 준공일자 : *********

□ LAN장비

○ 계 약 명 : LAN장비 구매

○ 계약업체 : 에이아이에스테크놀러지 주식회사

○ 계약금액 : ******************** ※ 조달수수료 별도

○ 계약일자 : ***********

○ 납품기한 : *********

□ 냉난방기

○ 계 약 명 : 냉난방기 구매

○ 계약업체 : 삼성전자(주)

○ 계약금액 : **************************** ※ 조달수수료 별도

○ 계약일자 : ***********

○ 납품기한 : **********

III				설계변경		‘

□ 건축/기계공사

○ 공사비 변경 내역 : **************************

구분	당초	변경	증감
공급가액	***********	***********	********
부가가치세	**********	**********	*******
도급비	***********	***********	********

○ 변경사유 : 무중력지대 강남 운영단체의 의견을 반영하여 설계변경

□ 검토의견

○ 무중력지대 강남 운영단체의 의견 반영으로 인한 설계변경은 감리자의 확인에 따라 적정한 것으로 판단됨.

IV				준공기한 연기		‘

□ 준공기한 연기 내용

공 종	당 초	변 경
건축/기계	*********************	**********************
전기/소방전기	*********************	**********************
통 신	*********************	**********************
LAN장비	*********************	**********************
냉난방기	*********************	**********************

□ 연기 사유 : ***********************

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

V				향후계획		‘

○ ’19.3월        설계변경 및 계약변경 의뢰

○ ’19.3월        공사 완공

○ ’19.6월        공사 준공

붙  임 : 건축, 기계공사 실정보고서 1부.  끝.