문서번호	설비부-3012
결재일자	2019.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
김현욱	여인웅	03/06 임정규

『장지지하차도 ~ 동부간선도로간 연결로 설치공사』

실정보고 사항 검토 보고

2019. 03.

도시기반시설본부

[ 설 비 부 ]

『장지지하차도 ~ 동부간선도로간 연결로 설치공사』

실정보고 사항 검토 보고

「장지지하차도 ~ 동부간선도로간 연결로 설치공사」시행중 발생한  전기공사(교통신호기) 변경사항에 대한 실정보고를 검토 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

동감(장지-동부)제19-8호(2019.03.05.), 실정보고(교통신호기) 제출

Ⅱ		공사개요

위    치 : 서울특별시 송파구 장지동 803-20 ~ 803-8 일원

규    모

○ 램프신설 :  Ramp-A(L=638m),  Ramp-B(L=455m)

○ 교량형식 : SB ARCH 합성거더

공사기간 : 2017.06.13. ~ 2019.09.30

총사업비 : 36,470백만원(전기 1,094백만원)

공사내용 : 가로등주 94본(신설 40, 이설 54), 분전반 3면,

교량점검등 212등, 교통신호기 이설, 견인차량보관소 이설 등

시 공 사 : 롯데건설㈜

감 리 사 : ㈜동일기술공사외 2개사(책임건설사업관리기술자 이진문)

시 행 자 : 롯데물산㈜, 롯데쇼핑㈜, ㈜호텔롯데

Ⅲ		검토내용

실정보고 사유

□ 송파구청 견인차량보관소 진출입로 변경에 따른 교통신호기 2본 신규 설치 반영

※ 교통안전시설 규제심의 결과(송파경찰서 교통과)

2018.12. : 송파구 견인차량보관소 진출입로 교통처리계획 협조요청 제출

2019.02. : 19년 1차 교통안전시설 심의결과 가결 통보

[송파경찰서 교통과-1890(2019.02.18.)]

□ 위치도

주요물량 변경 사항

품 목	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감
차량신호등	LED 1면 3색	조	0	6	증)6
디자인지주 (양날개)	267.4×6.4t×8.5m	본	-	1	증)1
디자인지주 (외날개)	216.3×6.0t×8.5m	본	-	1	증)1
신호케이블	F-CVV 1.5㎟×5C	M	-	185	증)185

공사비 변경 사항                                       (단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비 고
직접공사비	-	31,633	증)31,633
간접공사비	-	15,667	증)15,667
도 급 액	-	47,300	증)47,300

감리단 검토의견

□ 상기 검토내용과 같이 송파구청에서 견인차량보관소 신규 진출입부에        대한 신호등 신설 및 노면표시를 변경해 줄 것을 요구함.
□ 당초 설계는 진출입부에 대한 교통처리계획이 미반영되어 견인차량보관소        이용자들은 물류단지 방향으로 우회전 후 물류단지 내부로 진입하여         차량을 돌려 나와야 하는 상황으로 이는 사고위험이 높고 편의성이 떨어져        민원발생이 예상됨.
□ 이에 견인차량보관소 진출입부에 좌회전이 가능하도록 신호등을 신규로        설치하고 노면표시를 변경하는 것이 타당한 것으로 판담됨.

Ⅳ		검토의견

위 사업은 롯데월드타워(제2롯데월드) 신축사업에 따른 교통개선대책으로 사업시행자가 직접 시공하여 준공시설물 일체를 우리 시에 귀속하고 사업비는 ‘올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설사업’의 사업비와 정산하기로 한 사업으로

상기 실정보고 내용을 검토한 결과 책임건설사업관리기술자의 검토의견이       타당하여 실정보고 사항을 승인하고자 하며, 향후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임  실정보고(감리단) 1부.  끝.