문서번호	기전설비과-2071
결재일자	2019.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
이래운	조성태	유병기		03/06 배광환
협 조
	기획예산과장		박재희
	재무회계과장		김분숙
	시설과장		송병욱
	주무관		김형집

□상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!

「우면산아리수올림터 급수체계 개선 공사」

2019년 기계분야 관급자재 구매 계획

2019년 기계분야 관급자재 구매 계획 보고

2019. 3.

상수도사업본부

【 생산부】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	우면산가압장 급수체계개선 기본및실시설계용역
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

우면산 아리수올림터 급수쳬계 개선공사

2019년 기전분야 관급자재 구매 계획 보고

우리 본부에서 시행중인‘우면산 아리수올림터 급수체계 개선공사에 소요 되는 기전분야의 관급자재 구매 계획을 보고 드림.

Ⅰ		추진배경

◯ 추진목적 : 암사정수센터 저양정계통의 우면산아리수올림터에서 재가압에

따른 에너지 손실방지 및 전력비 절감

◯ 추진근거 : 2030 서울 수도정비기본계획(2013.12.)

Ⅱ		공사개요

◯ 공 사 명 : 우면산가압장 급수체계 개선공사

◯ 공사기간 : 2017.12.13. ~ 2020.05.30.

◯ 총사업비 : 14,005백만원(기전분야 사업비:4,485백만원)

◯ 주요내용(기계분야)

- 우면산 아리수올림터 신설(가압펌프, 수충격완화설비, 크레인, 밸브류 등)

- 암사정수센터 저양정계통 송수펌프 개량(송수펌프, 밸브류 등)

Ⅲ		2019년 사업계획(기전분야)

기계분야

전기분야

구분	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
우면산 아리수올림터 급수체계

※ 토목 및 건축공사 일정에 따라 변경가능

암사 수배전반 설치

암사 저양정 송수펌프 및 밸브 교체

양재 가압펌프 및 밸브류 설치

수충격완화설비 설치

가압펌프 연결배관 설치

양재 천장크레인 설치

양재 펌프 수배전반 설치

전선 케이블 설치 등 전기공사 진행

Ⅳ		관급자재 구매 개요

□ 구매방향

◯ 펌프(6개월) 및 수충격완화설비(5개월) 등은 제작기간을 고려하여 적기에    공급되도록 조기발주 및 납품일정 관리

◯ 기타 물품 또한 예산조기집행 목표달성을 위하여 조기 계약완료

◯ 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증)에 따라 위생안전기준(KC) 인증을    획득한 제품 구매

□ 구매내역

◯ 모터펌프(총12대, 2,350백만원)

구 분	설비명	규 격	대수	소요금액 (백만원)	비고
암사 저양정계통 (교체)	모터펌프	82[eqn: m ^{3}]/min×42mH×740kW 700A×500A	5	1,730	주펌프
		41[eqn: m ^{3}]/min×42mH×390kW 600A×450A	2		조절펌프
양재아리수올림터 (신설)	모터펌프	29[eqn: m ^{3}]/min×29mH×185kW 450A×350A	5	620
계			17	2,350

◯ 수충격완화설비(총1대, 320백만원)

설비명	규격	대수	소요금액 (백만원)	용도
수충격완화설비 (신설)	45[eqn: m ^{3}] (Air-chamber식)	1	320	양재아리수올림터 수격작용 완충

◯ 밸브류(총 28대, 280백만원)

설비명	규격 및 대수	소요금액(백만원)	용 도	비고
제수밸브 (전동식)	Φ600 × 5대 Φ500 × 5대	110	펌프 유지보수용
버터플라이밸브 (전동식)	Φ500 × 5대 Φ1200 × 1대	50	펌프 유량조절용
체크밸브 (완폐식)	Φ500 × 5대 Φ700 × 2대 Φ800 × 5대	120	펌프토출측 역류방지용
계	28대	280

Ⅴ		세부 구매계획

□ 암사정수센터 저양정 계통 송수펌프 제작구매

◯ 구매대상 : 모터펌프 7대(주펌프 5대, 조절펌프 2대)

◯ 소요예산 : **********

◯ 계약방법 : **************************************************************************************************************

- *****************************************                   **********************************

◯ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조제2항

- 취․송수펌프 구매절차 변경 등 성능개선 계획(기전설비과-531호 2012.2.7.)

- 종합낙찰제 세부운용기준[조달청훈령 제1710호, 2015. 8. 20.]

․대상제품 : 추정가격이 5천만원 이상이며 구경 500mm이상인 산업용 펌프

◯ 추진일정

- 2019. 3. : 기술검토(본부 안전총괄과)

- 2019. 4. : 일상감사(안전감사담당관)

- 2019. 4. : 발주 및 계약

- 2019.10. : 제작 및 납품(6개월 소요)

□ 양재아리수올림터 모터펌프 제작구매

◯ 구매대상 : 모터펌프 5대(가동 2대, 예비 3대)

◯ 소요예산 : ********

◯ 계약방법 : ************

- ****************************************

*****************************************

**********************************

※ 중소기업자간 경쟁제품 : 양흡입벌류트펌프-상수도용 토출구경 500mm미만

◯ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조제10호      - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제23조제1항

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조의2제2항제2호

◯ 추진일정

- 2019. 3. : 기술검토(본부 안전총괄과)

- 2019. 4. : 일상감사(안전감사담당관)

- 2019. 4. : 발주 및 계약

- 2019.10.: 제작 및 납품(6개월 소요)

□ 양재아리수올림터 수충격완화설비 제작구매설치

◯ 구매대상 : 수충격완화설비 1대

◯ 소요예산 : ********

◯ 계약방법 : ******

********************************************                     *******************************

◯ 추진일정

- 2019. 3. : 계약심사(본청 계약심사과)

- 2019. 4. : 발주 및 계약

-2019. 9. : 제작 및 납품(5개월 소요)

□ 우면산아리수올림터 급수체계 개선 밸브류 구매

◯ 구매대상 : 총 28대(전동밸브, 제수밸브 등)

◯ 소요예산 : ********

◯ 계약방법 : **********

◯ 구매방향

- 제품의 성능확보를 위하여 국가기관에서 품질을 인증한 제품 선정

- 버터플라이밸브는 개폐위치 불량으로 펌프기동 불가 등의 상황이 발생되지

않도록 과회전제한기능을 갖추고 지수효과가 우수한 제품 선정

- 체크밸브는 펌프 정지시 역류에 의한 충격을 완화할 수 있는 완폐식 적용

◯ 추진일정

- 2019. 4. : 특정제품 선정심의위원회 개최

※ 관련근거 : 정수시설분야 관련 업무개선 계획 보고(생산관리과-2319호, 2018.3.6.)

- 2019. 5. : 발주 및 계약

- 2019. 7. : 납품 및 설치(2개월 소요)

※ 펌프 구매일정에 따라 변경가능

□ 공통사항

◯ 예산과목 : 자본적지출, 건설중인자산,우면산아리수올림터 급수체계 개선,               시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 지방자치단체입찰 및 계약집행기준

2. 종합낙찰제 운영 세부기준 1부.

3. 계약법 요약(지명경쟁입찰) 1부.

4. 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매대상 1부.  끝.