“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(경사로 공공시설물 제작 및 설치 용역)

공공재생과-2236(2019. 3. 5.)호 관련으로 우리 부서에서 추진 중인***********************에 대해 아래와 같이 변경계약 의뢰(기간 연장요청)하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

********************************

*************************************

************************************

********************************

마. 변경내용

구 분	당 초	변 경	비고
계약기간	**********************	**********************	******* *********

바. 변경사유 : 동절기 굴착통제에 따른 시공제한 및 공사시행 관련부서 협의로 인한 기한 연장

사. 귀책사유 : 서울특별시(지체상금 미부과)

붙 임 : 1. 준공기한 연장 검토 보고서 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서 1부.  끝.

	공공재생과장
주무관	조선휘		공공재생사업팀장	윤재원		공공재생과장	03/06 이동일
협조자	계약1팀장	조현
시행	공공재생과-2248	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-8648	/전송	02-2133-0885	/	groba@seoul.go.kr	/	부분공개(5)