문서번호	서울숲공원지원과-396
결재일자	2019.3.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
	주무관	서울숲공원지원과장	동부공원녹지사업소장
노해민	강명환	박종수	03/07 안수연
협 조
	공원운영과장		오철선
	주무관		이정호

서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 추진계획

2019. 3

동부공원녹지사업소

(서울숲공원지원과)

서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 추진계획

서울숲 공원 수변(중앙)호수의 수질을 개선하고, 기반시설을 정비하여 쾌적한 시민 휴식공간으로 만들고자 함

Ⅰ		사업개요

사  업  명 : 서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업

위     치 : 서울숲공원 내 수변(중앙)호수(성동구 서울숲2길 8-15)

규     모 : 5,500㎡

사  업  비 : *******************

사업 기간 : 2019.03. ~ 2019.06.

사업 내용 : 퇴적물 준설 및 폭기분수(여과시스템) 설치, 수질정화식물 식재 등

Ⅱ		호수현황

현    황

▸ 규   모 : 담수량-11,735㎥, 수심-2.5~3.0m

▸ 수   원 : 2005년 공원개원 초기 기존골프장의 연못 심정수와 청계천 용수를 겸용으로 사용하였으나, 2008년 이후에는 분당선 지하철 배출수를 사용

▸ 설   비 : 사수펌프용 배관(200mm, 좌측 157m 우측 151m), 사수펌프(50HP, 2대, 2005년)

문 제 점

▸ 담수량 부족 현상 발생

- 공원조성 이후 14년간 많은 양의 퇴적물 바닥에 쌓이면서 담수량이 줄어듦

- 분당선 지하철 지하 유출수 부족 및 저수탱크 용량부족으로 호수 유입 수원 감소

▸ 녹조류 ＆ 규조류 발생 증가, 가동시 악취로 인한 사수펌프 미사용

퇴적물 준설, 수질관리용 폭기분수 및 여과시스템 구축, 수질정화식물 식재로 수질개선 필요

Ⅲ		시행계획

실시설계 : 소액수의계약

▸ 관련근거

1. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항

2. 수의계약 운영 개선계획(서울특별시장방침 제375호, 2015. 12. 13)

▸ 수의계약사유 : 본과업은 추정가격이 2천만원이하의 소액이며, 해당 분야 실시설계 경험이 많은 전문업체와 수의 계약

▸ 추진기간 : 2019. 03. ~ 04.

▸ 소요예산 : *******************

시설공사 : 제한경쟁입찰

▸ 관련근거

1. 지방계약법 제9조, 시행령 제20조 ~ 제21조

2. 행정안전부 예규(지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제4장)

▸ 참가자격 : 건설산업기본법 제9조 및 동법시행령 제7조에 의거 조경공사업 등록을 한 자로서 서울특별시에 주된 영업소를 둔 업체

▸ 추진기간 : 2019. 04. ~ 06.

▸ 소요예산 : *********************

Ⅳ		예산검토

소요예산 : **********

예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 응봉공원 시설물 정비, 시설비및부대비, 시설비

Ⅴ		향후계획

2019. 03.         : 추진계획 수립, 기술용역 타당성 심사

2019. 03. ~ 04. : 실시설계 용역 시행, 계약 심사

2019. 04. ~ 06. : 공사 시행 및 준공

붙임 : 위치도 및 설비 배관평면도, 현황사진 각 1부.  끝.

위치도 및 설비 배관평면도

수변호수

호수 위치도

설비 배관평면도

현 황 사 진

호수 현황

호수 현황