문서번호	한양도성도감-2411
결재일자	2019.3.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김동욱		신추교	03/11 진용득
협조

한양도성 백악~남산구간 성벽 보수정비 설계 시행계획

2019. 3.

문화본부

(한양도성도감)

한양도성 백악~남산구간 성벽 보수정비 설계 시행계획

한양도성 백악~남산구간의 풍화된 성돌 임시 보강공사 및 백악구간 토사유실 부분 보강공사, DDP내 성벽 보수정비를 위한 설계용역을 시행하고자 함

▣  추진 배경

❍ 추진 근거

- 한양도성 백악 및 남산구간 성벽 보수정비 추진 계획

(한양도성도감-1676, 2019. 2. 19.)

❍ 추진 경위

- ’18. 6.~8.   : 혜화동 전시·안내센터 주변 풍화성돌 구조보강 공사

- ’18. 7.       : 한양도성(백악구간) 군부대 통제구간 긴급정비

- ’18. 9.~10. : 다산 성곽길(동호로 17길) 성벽 임시 구조 보강 공사

▣ 용역 추진 계획

❍ 용역명: 한양도성 백악~남산구간 성벽 보수정비 설계용역

❍ 용역기간: 착수일로부터 75일

❍ 사업위치

- 백악구간(혜화동 약 100m, 부암동 약 40m)

- 남산구간(다산동 약 900m)

- 흥인지문구간(DDP 약 265m)

❍ 주요 과업내용

- 혜화동 및 다산동 구간 성돌 풍화, 빠짐 부분 등 임시 보강공사

- 부암동 외측 군부대 통제구간 성벽 하부 토사 유실구간 보강공사

- DDP내 성벽 상부 보수정비

❍ 계약방법: 수의계약

- 수의계약 사유: 추정가격 1.5천만 원 이하(용역)

· 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조제1항,   제30조제1항

· 수의계약 운영 개선 계획

❍ 계약업체

- 업체명: ************

- 주  소: ****************************

- 연락처: ***********

❍ 예정용역비: *****************

- 예산과목: 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 세계유산 등재 및 시민참여 활성화, 한양도성 학술조사 및 연구, 시설비

문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 한양도성 탐방로 조성 및 정비, 시설비/시설부대비

▣ 향후 일정

❍ ’19. 3. : 설계용역 발주, 계약, 착수

❍ ’19. 6. : 설계용역 준공

붙임  1. 사업추진 방침서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 산출기초조사서 및 견적서 1부.  끝.