문서번호	시설과-1548
결재일자	2019.3.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
전문관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
서동민	한상길	오임석	심상원		03/11 송천헌
협 조
	전략기획실장			代임문자
	총무과장			유연호

『안전하고 쾌적한 서울대공원 조성』

노후 하수관로 정비공사(5차) 추진계획

2019. 3.

서 울 대 공 원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「안전하고 쾌적한 서울대공원 조성」

노후 하수관로 정비공사(5차) 발주계획

설치된지 30년이 경과되어 노후 및 파손된 하수시설물에 대하여 연도별 ․체계적으로 보수 및 개량하는 사업으로 2019년 확보된 예산을 사용하여 하수관로 정비공사(5차)를 시행코자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 하수도법 제12조 같은법 시행령 제10조(설치기준)

□ 서울대공원 노후 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역(2015.9.30)결과 보고

Ⅱ		총사업현황

□ 총 시설물 현황

관 경	계	우수관로	오수관로	맨 홀	비 고
300~800㎜	44.9㎞	31.4㎞	13.4㎞	498개소

○ 공   사  명 : 서울대공원 노후 하수관로 정비공사(연차사업)

○ 총 공사개요 : 8,064m

- 노후 하수관(우수) 개량 : D=300㎜ ~ 800㎜,  L = 2,633m

- 노후 하수관(오수) 개량 : D=300㎜ ~ 800㎜,  L = 5,431m

○ 총 사업기간 : 2015. 03 ~ 2019. 12. 30(연차사업)

○ ********************

○ 년도별 집행실적 및 계획

(단위 : 천원)

분 야	계	1~4차	5차	비고
		‘15~’18년	‘19년
****	*********	*********	*******
*****	*********	*********	*******
*****	*********	*******	*
****	******	******	******

※ 차수별 완료 현황(1~4차)

(단위 : 천원)

연 도	사업비	사업개요				비고
		계	우 수	오 수	보도정비
계	*********	6,873m	1,493m	5,380m	61a
‘15년(1차)	*********	851m		851m		용역비 포함
‘16년(2차)	*********	1,710m	570m	1,140m	61a
‘17년(3차)	*******	1,980m	500m	1,480m
‘18년(4차)	*********	2,332m	423m	1,909m

Ⅲ		2019년도 시행계획

○ 공 사 명 : 서울대공원 노후 하수관로 정비공사(5차)

○ 공사기간 : 2019. 3. ~ 9. 30.

○ 공사위치 : 서울대공원

○ 공사개요 : 총 1,191m(우수관 1,140m,  오수관 51m)

○ 공사금액 : *********

○ 공사개요 : A(남측), B구간(북측)으로 나누어 비굴착 시행

연번	관 경	계	A구간		B구간		비 고
			우수	오수	우수	오수
계		1,191m	308m	51m	832m	-
1	D300	608m	218	18	372	-
1	D400	154m	-	-	154	-
2	D450	306m	-	-	306	-
3	D600	33m	-	33	-	-
4	D700	90m	90	-	-	-

○ 예산과목

서울대공원, 공원이용시민 만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비

○ 입찰 방법 : 공개경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰 참가자격

『건설산업기본법』에 의한 상하수도 설비공사업 면허를 보유한 업체로 입찰         공고일 전일부터 입찰일 까지 서울 또는 경기도에 주된 영업소를 둔 업체

Ⅳ		기 대 효 과

○ 노후 파손된 하수시설물 체계적 보수 및 개량으로 침수 사전 예방

○ 하수관로 준설로 쾌적한 공원환경 조성

Ⅴ		향 후 계 획

○ 2019.  3. : 공사발주

○ 2019.  4. : 공사계약 및 착공

○ 2019.  9. : 공사완료

○ 중기 연차 사업으로 원활한 공사추진을 위해 당해연도 예산을 최대한 활용하여 사업 시행.

첨부 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

공사 위치도 및 현황사진

		위 치 도

		현황사진

끝.