문서번호	정수시설과-678
결재일자	2019.3.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김현철		조귀현	03/11 이달영
협 조

“마셔 보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

’19년 자동제어설비 유지관리용역 발주계획

2018. 3.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

’19년 자동제어설비 유지관리용역 발주계획

우리 센터 정수공정 감시·제어 설비의 효율적인 유지관리와 돌발상황 신속 대응·복구를 위한「’19년 자동제어설비 유지관리 용역」발주 계획을 보고 드림

1		용역개요

□  근거

○ 2019년도 기전설비 유지보수 품셈단가 배포(기전설비과-1216호)

□  용역명: 2019년 자동제어설비 유지관리 용역(장기계속계약)

○ 용역기간 : 계약일 ~ 2020.03.31

○ 예 산 액 : 60,000천원

○ 예산과목 : 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(자동제어설비유지관리용역)

□  주요내용

○ 자동제어설비(하드웨어, 소프트웨어) 정기 점검 및 업데이트

○ 데이터 송수신 상태 및 관련장비 점검

○ HMI, PLC 프로그램 보완(수정) 및 장애 (긴급)복구

○ 주요기반시설 기술적 취약점 개선조치(방안제시)

정수제어시스템 주요설비 현황

구분		주요 장비
제어설비	수량	HMI 9	허브 61		PLC 70		ETOS 7
	대상	TMTC반, RCS#1 ~ 9, 현장제어반
정보시스템	수량	방화벽 1대		통신서버 2대		DB서버 2대		PC 13대
	대상	서버랙#1 ~ 2						제어실 등

2		세부계획
		ㅊ

□  발주방법

○ 소요예산: 60,000,000원

- 정수비(712), 수선유지교체비(214), 수선유지비(자동제어설비유지관리용역)

구분	합계(원)	1차수	2차수	비 고
소요예산	60,000,000	47,000,000	13,000,000	서버, 방화벽, 프로그램 보완 (1차수 시행)
용역기간		착수일 ~ 19. 12. 31.	2020. 1. 1. ~ 3. 31.

○ 계약방법: 장기계속계약

○ 입찰방법: 지명입찰

○ 용역기간: 착수일로부터 2020. 3. 31. 까지

	입찰방법의 사유
○ 근거:「지방계약법」시행령 제22조(지명입찰에 의할 계약) 제2호 - 추정가격이 2억원 이하인 용역계약 ○ 사유: 대형 정수제어설비의 점검 및 긴급복구는 다양한 장비와 복잡하게 분산·조직된 프로그램을 안정적으로 유지, 관리할 수 있는 경험과 고도의 전문성이 요구되므로 경험과 전문성을 보유한 업체를 대상으로 지명입찰코자 함 ※ 아래 입찰참가 자격을 보유한 우수업체를 ‘한국자동제어협동조합’에서 추천(5개사 이상) 받아 사업목적에 부합되도록 시행

○ 지명입찰 참가자격

-「중소기업제품 판로지원법」제9조(직접생산의 확인 등)에 의한 직접생산    (계장계측제어장치)이 가능하고 소프트웨어 사업자등록증을 소지한 업체    로서 서울․경기지역에 소재한 업체

□  추진일정

○ 2019. 3. : 용역설계심사요청(본부 안전총괄과)

○ 2019. 3. : 심사결과에 따른 계약의뢰

○ 2019. 4. : 계약 및 착공

○ 2019.12. : 1차수 준공

○ 2020. 3. : 최종 준공

붙임: 1. 과업내용서 1부.

2. 설계내역서 1부.    끝.