＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	계약 변경 의뢰(국사봉배수지 건설공사 전기공사)

1. 기전설비과-2389(2019.03.13)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행 중인『국사봉배수지 건설공사 전기공사』관련 원활한 사업 추진을 위하여 아래와 같이 계약 변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 국사봉배수지 건설공사 전기공사

- 계약번호 : 20181******** 00

나. 계약대상 : 실리기업 주식회사(대표 김홍식)

다. 계약기한 : 2019.01.01. ~ 2019.05.19.

라. 계약금액 : 금176,607,860원(금일억칠천육백육십만칠천팔백육십원)

마. 변경내역

구 분	변경내역		비 고
	당 초	변 경
계약기간	‘19.01.01. ~ ‘19.05.19.	‘19.01.01. ~ ‘19.07.17.	59일 연장
계약금액	176,607,860원	176,607,860원	변동 없음

바. 변경사유 : 선행공정 지연에 따른 전기공사 공사기한 연장

붙임 1. 준공기한 연장 방침서 1부.

2. 준공기한 연장 합의서 1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	이기상		기전설비과장	03/13 조성태
협조자
시행	기전설비과-2398	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 생산부 기전설비과	/
전화	02-3146-1338	/전송	02-3146-1319	/	edge@seoul.go.kr	/	대시민공개