문서번호	기전설비과-2389
결재일자	2019.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장
이기상	조성태	03/13 유병기
협 조
	주무관		최이영

□상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!

「국사봉배수지 건설공사」

전기공사 공사기한 연장 검토 보고

'국사봉배수지 건설공사' 전기공사 공사기한 연장 검토 보고

2019. 3.

상수도사업본부

(생  산  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□	국사봉배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「국사봉배수지 건설공사」

전기공사 공사기한 연장 검토 보고

「국사봉배수지 건설공사 전기공사」공사 중 선행공정 공기지연에 따른 원활한 사업 추진을 위해 전기공사 공사기한을 아래와 같이 연장코자 함

□ 공사 개요

◯ 공 사 명 : 국사봉배수지 건설공사 전기공사

◯ 계 약 자 : 실리기업(주) 대표 김홍식

◯ 공사기간 : [총 차] ’18. 4. 2. ~ ’19. 5. 19.(장기계속공사)

[2 차] ’19. 1. 1. ~ ’19. 5. 19.

◯ 공사금액 : [총 차] 224,325,860원

[2 차] 176,607,860원

◯ 공사내용 : 아리수 원활한 공급을 위한 배수지 건설공사에 따른 전기공사

- 전기설비공사 1식(전원인입설비, 수변전설비, 접지설비, 전등・전열설비)

- 계측제어설비공사 1식(수위계, 수위스위치, 유량계, 수질계, CCTV)

□ 그간 추진경과

◯ 시  공  사 : 토목공정 중 경질암 발생에 따른 소음민원 및 공사지연 보고

◯ 시  설  과 : 경질암으로 인한 소음민원 발생으로 공법 변경 및 공기 연장

- 공법 변경 : [당초] 브레이커 공법   → [변경] 할암 공법

- 공기 연장 : ’18.1.1. ~ ’19.5.29. →  ’18.1.1. ~ ’19.7.17.(59일 연장)

※ 도로관리청 동절기 도로굴착 통제에 따른 관로공사 불가 기간 반영 등

◯ 감  리  단 : 선행공정(토목・건축공사) 지연에 따른 설계변경 요청

◯ 기전설비과 : 선행공정 지연에 따른 차수별 물량 및 계약금액 조정(설계변경)

- 물량 조정 : 선행공정(토목・건축공사) 지연에 따른 전기설비공사 설치물량 변경

- 설계 변경 : 금180,587,000원 →  금47,718,000원(△ 132,869,000원)

□ 검토결과

◯ 선행공정 지연에 따른 차수별 물량 조정으로 전기공사 공사기한 연장 필요

- 당 초 : [2차수] ’19. 1. 1. ~ ’19. 5. 19.

- 변 경 : [2차수] ’19. 1. 1. ~ ’19. 7. 17.(59일 연장)

◯ 지연배상금 : 미부과(※ 귀책사유 : 상수도사업본부)

□ 행정사항

◯ 공사기한 연장에 따른 변경계약 의뢰

◯ 전기공사 추진에 따른 관급자재 구매

붙임 1.「국사봉배수지 건설공사」공기연장 및 동절기 공사중지 요청 검토보고 1부.

2.「국사봉배수지 건설공사 전기공사」실정보고 검토 결과보고 1부.

3.「국사봉배수지 건설공사 전기공사」준공기간 연장 합의서 1부.  끝.