투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재(조명기구) 납품기한 연기요청(노들섬 특화공간 조성 전기공사)

1. 우리 본부부에서 시행하는 “노들섬 특화공간 조성 전기공사”용 관급자재(조명기구)에 대하여 아래와 같이 납기 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기요청 내용

품 명	계약번호 (납품요구번호)	계약자	납품기한		비고
			당초	변경
****	*********** **************	******	2019.05.20	2019.08.30
*******	*********** **************	******	2019.04.09	2019.08.30
******	*********** **************	******	2019.03.20	2019.08.30

나. 연기사유 : 건축공정 연기에 따른 전기공사용 관급자재(조명기구) 사용시기 미도래

다. 계약금액 및 수량 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임  1. 보고서 1부.

2. 감리단 공문 1부.  끝.

	설비부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	03/14 임정규
협조자	재무예산과장	홍수열
시행	설비부-3542	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8616	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	부분공개(5)