문서번호	시설관리과-5080
결재일자	2019.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
이한수	정진호	이경희	03/15 배현숙

2019년 노후 유량계 설비 교체 계획

2019. 3.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 노후 유량계 설비 교체 계획

우리 사업소 관내 노후 유량계 및 전송반을 교체하여 유량 계측 정밀도를 높은 수준으로 유지 관리함으로써 유수율 향상에 기여하고자 함.

□ 추진근거

❍「2019년 유량계 설비 유지관리계획」(본부 누수방지과-657호, ’19.1.17.)

❍「2019년 유량계 설비 유지관리계획」(시설관리과-4005호, ’19.3.4.)

□ 설비현황

(단위 : 개소)

구 분	계	구 역	중블록	올림터	배수지	비 고
계	34	4	11	16	3	휴대용 1대
초 음 파	33	4	11	15	3
전 자 식	1			1

□ 유량계 설비 교체 계획

❍ 사업대상 : 3개소(유량계 1대, 전송반 3면)

연번	시설물명	소 재 지	관경 (mm)	설치년도		유량계 형 식	사업대상
				유량계	전송반
1	KS-8	구로구 구로동 1131-6	600	’10.10	’05.07	건식	전송반
2	KSM-1	양천구 목동 517	1,000	’12.02	’05.07	건식	전송반
3	KSM-10	양천구 신월동 산68-3	1,100	’05.05	’05.05	건식	유량계, 전송반

※ 내용연수(조달청 고시 제2014-12호) : 유량계(11년), 전송반(10년)

❍ 사업기간 : 2019. 3. ~ 6.

❍ 계약방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

❍ 사업예산 : 48,000천원

※ 유량계 조달구매 소요예산 : 42,756천원

시설물명	형식	관경	물품식별번호	수량	단가	금액	비고
KS-8	전송반		22500318	1	9,200,000	9,200,000
KSM-1	전송반		22500318	1	9,200,000	9,200,000
KSM-10	초음파(습식)	1,100	21632390	1	17,810,000	17,810,000
	전송반		22276053	1	6,317,000	6,317,000
계						42,527,000	VAT 포함
조달수수료	0.54%					229,640
합계						42,756,640

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

□ 세부추진 계획

❍ 조달발주 및 계약의뢰       ----------------------- ’19. 3월 말

❍ 계약체결 및 사업 시행      ----------------------- ’19. 4월 ~ 6월

❍ 시운전 및 준공             ----------------------- ’19. 6월 말

▢ 행정사항(발생품 고재처리)

❍ 내용연수가 경과된 노후 전송반 철거품(스텐인레스 120Kg 추정)에 대하여       철거 후 별도 고제처리 후 잡수익 계상 처리

붙임 : 유량계 현황 1부.  끝.