문서번호	시설개선과-2381
결재일자	2019.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
안현미		이영교	03/15 윤정한
협 조

- 잠실종합운동장·구의야구공원 조경시설 정비공사 -

시공사 실정보고에 따른 검토보고

2019. 3

체육시설관리사업소

[시설개선과]

- 잠실종합운동장·구의야구공원 조경시설 정비공사 -

시공사 실정보고에 따른 검토보고

『잠실종합운동장·구의야구공원 조경시설 정비공사』와 관련 시공사로부터 접수된 실정보고(2차) 사항(계약 수량 및 공정변경)에 대한 검토 보고 사항임.

공사개요

○ 공 사 명: 잠실종합운동장·구의야구공원 조경시설 정비공사

○ 공사개요

- 철거공: 수목제거, 시설물 및 포장 철거, 폐기물 상차

- 식재공: 수목이식, 신규수목 식재, 식재기반 조성

- 시설물공: 데크, 스탠드, 가벽, 자연석 이설, 포장 및 경계석 설치

○ 사 업 비:*************

- 도급비:*************

- 관급비:*************

○ 공사기간: 2019. 2. 25. ~ 6. 4.

○ 시 공 사:****************

○ 공사위치: 잠실종합운동장, 구의야구공원

○ 추진경위

- 2019.  01. 11    발주방침

- 2019.  02. 01    공사발주

- 2019.  02. 18    공사계약

- 2019.  02. 25    공사착공

- 2019.  06. 04    준공예정

시공사 실정보고 내용 및 검토의견

실정보고 내용			검토의견
구분	현황 및 문제점	조치의견
▹ 현장여건 조사 및 설계도서 검토사항.
구의 야구 공원	◦디자인형 울타리 스텐드연장구간 현황에 맞게 설치 길이 및 디자인 조정 필요. ※ 관급업체(휀스) 실측 후 요청 내용	-현황 스텐드 연장길이에 맞게 디자인형 울타리 설치수량(37m→39m) 변경 -경사구간은 당초 계단날개 상단에 설치 가능한 디자인으로 변경하여 설치.	승인
풋살장 인근	◦경계석 신규 설치에 따른 기존보도 포장면 일부 재설치 필요.	-경계석 신규설치구간으로부터 폭 1M구간의 기존 블럭을 철거 후 바닥면 정리후 재포장 하여 표면 배수가 원할 할 수 있도록 함.	승인
웅비탑	◦당초 기존포장(석재타일)상단에 플랜터A를 시공하도록 설계되었으나 당초대로 시공시 플랜터 하단면의 몰탈 면이 노출됨에 따라 보완 시공이 필요. ◦당초 플랜터내 계획된 배수시설은 플랜터의 구조상(자체 배수가능) 불필요한 시설로 사료됨.	- 플랜터A 설치구간내의 일부 석재타일을 컷팅 후 철거하여 플랜터A 하단부분이 포장면 보다 낮게 시공. -당초 계획된 연결관, 점검구, 집수정시설은 물량 삭제.	승인
동남문~학생 체육관 인접 녹지	◦기존 자연석 철거 후 이설 장소로 구의야구장 및 올림픽주경기장 후면 주차장 법면구간에 이설 할수 있도록 검토. (발주처 요청사항)	-구의야구공원 : 북측계단 좌우측 법면 및 스텐드측면 보강토블럭 상단에 일부이설(토사유실방지 및 식재 토심 확보 후 관목식재를 통한 법면녹화) ※ 운반비(9Km) 추가 반영 필요 -종합운동장 : 주경기장 후면 주차장사면 및 웅비탑 좌측 파고라 인접 녹지부에 조경석 이설	조건부 승인 [웅비탑 좌측 녹지 조경석 이설 제외]

조치의견

○ 위와 같이 시공사의 실정보고를 검토한 결과 타당하여 승인 조치하고, 추후 설계변경 시 금액 조정에 반영코자 함.

붙임  시공사 실정보고서(2차) 1부.  끝.