문서번호	정수시설과-2731
결재일자	2019.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		양영민	03/15 유성종
협 조
	주무관			김희수

『고도정수처리시설 과산화수소 약품투입설비 개선사업』

과산화수소 주입설비(AOP) 전기공사 발주계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『고도정수처리시설 과산화수소 약품투입설비 개선사업』

과산화수소 주입설비(AOP) 전기공사 발주계획 보고

우리 정수센터 고도정수처리장 과산화수소 투입설비 증설 및 개량에 따른 전기공사

발주계획 보고임[관련문서: 과산화수소 약품투입설비 개선계획_정수시설과-1925호].

1		사업 개요

❍ 사 업 명: 고도정수처리시설 과산화수소 약품투입설비 개선

❍ 사 업 비: 금475,000천원

❍ 사업내용

- AOP 정량펌프(350L/hr×4.0kg/㎠) 3대 증설

- AOP 가압수공급펌프(80A×11kW) 1대 증설

- 과산화수소저장탱크 4기 이설 및 기존 펌프 5대 재활용 등

◆ 과산화수소 약품투입설비 현황 - 위 치 : 암사아리수정수센터 고도정수처리시설 - 주요기기 · 과산화수소 저장탱크(FRP, 7.5㎥, 4기) · AOP정량펌프(다이어프램, 2100ml/min×10bar×0.4kW, 2대) · 가압수공급펌프(입형다단원심펌프, 8l/h×55mH×11kW, 3대)

❍ 사업기간: ’19. 03. ~ ’19. 07.

2		전기공사 발주계획

❍ 공 사 명: 고도정수처리장 과산화수소 주입설비(AOP) 전기공사

❍ 공사내용: 과산화수소 AOP(정량펌프식) 3대 및 과수주입설비 설치에 따른 전기공사 1식

❍ 공사기간: 착수일로부터 100일

❍ 소요예산: 22,000천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비[과산화수소 약품투입설비 개선]

❍ 발주방법: 수의계약(관련근거: 지방계약법 시행령 제25조 1항 5호)

※ 지자체 입찰 및 계약 집행기준(행안부 예규 제39호) 제5장, 제2절 수의계약 유형별 구분(1인견적가능)

- 수의계약사유: 공사금액이 소액이고 해당 과산화수소 약품투입기(기계설비) 제작구매                       설치에 따른 전기공사를 전기공사업 면허가 있는 우수업체를 통해 신속히                       수행하여 품질 좋은 먹는물 생산에 만전을 기하고자 함

- 계 약 업 체: *************************************

3		추진 일정

❍ 2019.  3. 18.   : 행정관리과 계약 의뢰

❍ 2019.  3. 29.   : 계약완료 및 착수계 제출

❍ 2019.  4. 05.   : 관계자 착수 회의

❍ 2019.  7. 15.   : 시운전 및 공사 완료

붙임 : 1. 견적내역서 1부.

2. 약품투입설비 개선계획 보고서.  끝.