투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기 수정 요청 - "2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기공사(등촌삼거리)

1. 2018년도 사업 추진중인『2018년 중앙버스전용차로 등촌삼거리』에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기요청을 수정하여 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2018년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기공사

나. 계 약 자 : 주식회사 다산지앤지 대표 유 철 종

다. 계약금액 : 금128,806,040원(금 일억이천팔백팔십만육천사십원)

라. 준공기간 변경

- 당 초 : 2018. 12. 18 ~ 2019. 3. 17

- 변 경 : 2018. 12. 18 ~ 2019. 5. 17

마. 연기사유

- 2019년 도로교통 안전개선사업 교통신호기 감리용역 미선정에 따른

설계변경 및 준공처리가 불가능한 상태임

바. 지체상환금 부과여부 : 미 부과

따로붙임  1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 합의각서 1부.

3. 방침서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	김동기		기전과장	03/15 서승완
협조자
시행	기전과-2447	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개