문서번호	급수운영과-6000
결재일자	2019.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
황대룡	이상환	송근호		03/15 이구석
협 조

공사 발주계획

(2019년 동부수도사업소 관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약))

2019. 3.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

공사 발주계획 (2019년 동부수도사업소관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약))

2019년도 우리 사업소 관내 상수도공사에 따른 포장도로 굴착복구공사 장기계속단가 계약 발주 계획을 수립하여 추진하고자 함.

Ⅰ		2019년 굴착공사 예정 현황

○ 굴착공사 및 직접복구비 예상금액                                                                                      (단위:백만원)

연 번	구 분	현 황		비 고
		예산액	예상직접복구비
	계	26,312	3,103	12%
1	송배수관정비공사	4,000	600	15%
2	배급수관정비공사	9,600	1,240	15%
3	시설물 공사	4,204	21	5%
4	누수복구공사	4,087	613	15%
5	수탁급수공사 등	4,421	629	15%

Ⅱ		2019년 포장복구공사 발주 계획(안)

○ 2018년 포장복구공사 계약 및 정산 현황

(단위 : 백만원)

설계금액	발주금액	계약금액	기정산금액	잔액	비 고
3,093	2,985	2,605	2,322	283

○ 2019년 포장복구공사 발주계획(안)

- 공 사 명: 2019년 동부수도사업소관내 포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약)

- 공사지역: 동부수도사업소 관내

- 공사개요: 도로포장 268a(아스팔트 251a, 콘크리트 6a, 보도 11a)

- 공사기간: 착공일 ~ 2020.05.31.

- 발주예정 금액(도급비): 2,650,000천원(설계심사 요청액:3,103,972천원)

※ 본청 계약심사 결과에 따라 발주금액 조정

Ⅲ		계 약 방 법

○ 관련근거: 「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률」제24조(장기계속계약)

○ 입찰방법: 공개경쟁입찰(긴급)

○ 예정물량 산출: 총 예정물량은 장기계속계약 절차에 따라 2016~2018년

까지 3개년 평균치를 산출하여 전체 설계물량으로 예상하여 산출

Ⅵ		세부 추진계획

○ 본청 설계심사의뢰: 2019.03.15.

○ 계약의뢰: 2019.03.25.

○ 입찰공고: 2019.04.1

○ 공사계약 및 착공: 2019. 4월말

첨부 : 설계내역서 1부. 끝.