문서번호	도시철도토목부-2786
결재일자	2019.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		궤도과장	도시철도토목부장
최경호		최진규	03/18 정대현
협 조
	주무관			김근수
	주무관			정중규

『하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)』

궤도공사 시점부 분기기후단 현장 실정보고 검토

2019. 03.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)』

궤도공사 시점부 분기기후단 현장 실정보고 검토

『하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)』시행 중 시점부 운행선 분기기 후단에 설치되는 침목에 대하여 현재 사용 중에 있는 재질로 시공하고자 책임건설사업관리기술자 보고에 따라 아래와 같이 검토  보고 함.

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 하남궤2-19-136호(2019.03.11.) 하남선 궤도2공구 공사 시점부 분기기 후단 침목 변경 실정보고

Ⅱ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 하남선(5호선 연장) 궤도공사(2공구)

❍ 공사구간 : 경기도 하남시 덕풍동 ~ 경기도 하남시 창우동

❍ 계약기간 : 2018.11.05. ~ 2019.11.04.

❍ 계 약 자 : 화성궤도(주)

❍ 건설사업관리 : ㈜신승엔지니어링외 3사

❍ 계약금액 : 4,585,827,000원

Ⅲ		현 황

❍ 분기기 후단에 합성수지침목으로 교환 예정

❍ 서울교통공사 협의 및 궤도공사 일정(2019. 04. 03.)에 맞춰 시행하고자 분기기 후단에 침목을 현재 사용 중에 있는 본선과 같은 LVT 침목으로 변경

Ⅳ		건설사업관리기술자 검토 의견

❍ 합성수지침목은 궤도공사 일정에 맞게 대체 침목 필요

❍ 기존 침목(STEDEF) 설치

- 발생품 재사용 : 설치, 철거시 침목 변형 우려

- 기성제품이 없어 별도제작 : 제작 소요일 장기

❍ 신설 침목(LVT) 설치

- 자재수급이 원활하고 신설선의 동일침목 사용

❍ 발생침목(STEDEF)의 재사용에 따른 품질저하 방지 및 자재수급이 원활하고 향후 본선 운행시 본선구간의 단차를 제거를 위하여 신설 침목(LVT) 설치함이 유지보수관리에 유리

Ⅴ		조치계획

❍ 책임건설사업관리기술자 의견과 같이 분기기 후단부 침목 종류를 변경(합성수지침목 ⇒ LVT침목)하여 우선 시공하고, 변경된 증·감 내역은 추후 설계변경시 정산 반영하고자 함.

- 개략 사업비 : 증 2,500천원

붙임 : 관련문서 사본 1부.  끝.