문서번호	설비부-3827
결재일자	2019.3.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	03/19 임정규
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

2019. 03.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

「남산예장자락 재생사업 전기공사」에 소요되는 관급자재인 주차관제설비 및 가로등주에 대하여 설치시기 미도래하여 납품기한 연기하고자 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규    모 : 지하주차장 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`19.12.31

□  공 사 비 : ***********************************

□  감 리 사 : ㈜동성엔지니어링

□  시 공 사 : ***************

□  공정율 : 14%(옥외 가로등 설치 준비중)

2		관련근거

□  남산예장감리 제19-95호(`19.03.15.) : 건설사업관리기술단         관급자재 납품기한 연기 보고

3		납품기한 연기내용

□  납품기한 연기 내용

품 명	계 약 자	계약금액	납품기한
			당 초	변 경
주차관제장치	*****	***********	`19.3.31	`19.5.31
주차부스	*****	**********	〃	〃
옥외조명설비	****	**********	〃	`19.10.31
가로등주 및 부속자재	*******	***********	`19.3.31	`19.10.31
도로조명설비	*******	***********	〃	〃
분전반	*****	**********	〃	〃
조명제어장치	*******	**********	〃	〃

□  연기사유 : 소방재난본부 리모델링 현장의 지상주차장과 도로 포장        작업이 완료되지 않아 주차관제장비 및 도로조명설비 설치 불가

□  귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

4		보고자 조치의견

□ 위 내용과 같이 관급자재 납품시기를 조정하여 적기에 수급 가능

하도록 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙 임 : 감리단 공문 1부. 끝.