문서번호	투자창업과-2892
결재일자	2019.3.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	창업기반조성팀장	투자창업과장
노은영	백명숙	03/19 최판규

「서울창업카페 교대점 인테리어공사 설계용역」 준공기한 연기 검토보고

2019. 3.

경제정책실

(투자창업과)

『서울창업카페 교대점 인테리어공사』

설계용역 준공기한 연기 검토보고

서울창업카페 교대점 조성을 위한 인테리어 공사 기본 설계 용역추진과 관련,

관련기관 협의 등 소요기간 연장에 따른 준공기한 연기를 검토 보고함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 서울창업카페 교대점 인테리어 공사 설계용역

○ 용역기간 : 2019. 2. 20. ~ 2019. 3. 21 (30일)

○ 용 역 사 : 스튜디오인로코 건축사사무소 대표 강승현

○ 용 역 비 : 10,690천원

○ 위    치 : 교대역 13·14번 출구 지하보도내 서울교통공사 쇼핑몰

※ 서울교통공사 소유시설로 임대차계약(서초구-메트로) 추진

○ 규    모 : 184㎡

□ 추진경과

○ 서울창업카페 교대점 인테리어 설계 및 공사계획 수립(’19. 1월)

○ 기술용역 타당성 심사 요청(’19. 1월)

○ 인테리어 공사 설계용역 수의계약 의뢰(’19. 2월)

○ 설계 용역 착수(’19. 2월)

○ 서울교통공사-서초구 간 임대차 계약 추진 중(’19. 2~3월)

○ 현장조사 실시 및 설계관련 사전 협의(서울교통공사)(’19. 2월)

○ 기본 설계안 브리핑 및 자치구 협의(1~3차)(’19. 2~3월)

○ 최종 설계내역 검토 요청(서울교통공사)(’19. 3월)

※ 서울교통공사 전기·시설분야 설계내역 검토 승인 중

□ 준공기한 연기 검토

○ 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	’19.3.21.	’19.4.1.	11일 연장
계약금액	10,690천원	변경없음

○ 연기사유 : 관련기관 협의기간 추가 소요에 따른 과업기간 부족

- 서울교통공사 전기·시설 분야 설계내역 타당성 검토 승인 등 협의기간 추가 소요

○ 지체상금 : 미부과

□ 조치사항

○ 서울창업카페 교대점 인테리어공사 실시설계용역 준공기한 연기 의뢰(재무과)

□ 향후 추진계획

○ ’19. 4. 1 : 용역 준공

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.